붙임 1-3

행복주택 신규사업(건설) 재정소요액

서울특별시                                                                                                 (단위 : 천원)

사업 승인 (계획) 년월	구분	사업 지구	기준 평형 (a)	평당 지원 단가 (b)	사업 승인 호수 (c)	총 사업비 (d=a×b×c)	재정 지원 비율 (e)	재정 지원 총액 (d×e)	연도별 지원액				추진일정(계획)
									‘14	’15	’16	’17	착공	공급	준공 (입주)
14.07	건설	신내 행복주택	13.6	6,592	119	10,668,492	30%	3,200,548	640,110	800,137	800,137	960,164	'14.12		'17.09
14.07	건설	강일 11단지 행복주택	13.6	6,592	346	31,019,315	30%	9,305,795	1,861,159	7,444,636			‘14.02		‘15.09
14.07	건설	천왕 7단지 행복주택	13.6	6,592	374	33,529,548	30%	10,058,865	2,011,773	8,047,092			‘13.10		‘15.09
14.04	건설	내곡 도시형 생활주택	13.6	6,592	87	7,799,654	30%	2,339,896	467,979	1,871,917			‘14.04		‘15.08
14.09	건설	천왕2 도시형 생활주택(A)	13.6	6,592	181	16,226,867	30%	4,868,060	973,612	1,217,015	2,677,433		'14.12		'16.07
14.09	건설	천왕2 도시형 생활주택(B)	13.6	6,592	138	12,371,866	30%	3,711,560	742,312	927,890	2,041,358		'14.12		'16.04
계								33,484,724	6,696,945	20,308,687	5,518,928	960,164

* 신내행복주택 200호 중 전용 45㎡ 초과분 81세대 제외

’14년 행복주택 신규 건설(사업승인) 계획

서울시(도)

구분

내용

비고

대지위치

서울시(도) 중랑구 신내동 640번지 일원

사업명

신내동 공공주택(행복주택) 건설공사

사업기간

2012.01월 ~ 2017.10월

(추정)사업비

총 47,478,436천원

(대지비 16,076,240천원, 건축비 25,163,120천원, 부대비 5,639,096천원)

대지면적

5,432.00㎡

건축연면적

24,642.656㎡

건설개요

유형	호수 (규모별)	공급면적 (㎡)	전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)
합계	200	13,371.72	8,632.819	4,738.9104
행복 (건설)	104 (39A)	61.0451	39.193	21.8521
행복 (건설)	15 (39B)	60.3699	39.095	21.2749
행복 (건설)	70 (49A)	75.4468	49.017	26.4298
행복 (건설)	11 (49B)	76.0195	49.012	27.0075

규모별(형별)로 구분 작성

추진계획

- 도시계획 : 2012년 10월

- 사업승인 : 2014년  7월

- 착    공 : 2014년 12월

- 준    공 : 2017년 09월

기타사항

서울시유지 활용 공영주자창 복합개발사업

※ 첨부 : 사업승인서 사본 1부

’14년 행복주택 신규 건설(사업승인) 계획

서울시(도)

구분

내용

비고

대지위치

서울시 강동구 강일동 강일도시개발사업지구내

사업명

강일지구 11단지 아파트 건설공사

사업기간

2014. 2월 ~ 2015. 10월

(추정)사업비

총 51,579,022천원

(대지비 19,642,436천원, 건축비 31,936,586천원)

대지면적

9,811㎡

건축연면적

25,210.72㎡

건설개요

유형	호수 (규모별)	공급면적 (㎡)	전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)
합계	346
행복 (건설)	274	47.44	29.96	17.48
행복 (건설)	72	47.39	29.97	17.42

규모별(형별)로 구분 작성

추진계획

- 지구지정 : 2003년 11월

- 개발계획 : 2004년 12월

- 실시계획 : 2004년 12월

- 사업승인 : 2014년   7월

- 착    공 : 2014년  2월

- 준    공 : 2015년  9월

기타사항

※ 첨부 : 사업승인서 사본 1부

’14년 행복주택 신규 건설(사업승인) 계획

서울시(도)

구분

내용

비고

대지위치

서울시 구로구 천왕동 천왕도시개발사업지구내

사업명

천왕지구 7단지 아파트 건설공사

사업기간

2013. 10월 ~ 2015. 10월

(추정)사업비

총 55,403,772천원

(대지비 21,957,156천원, 건축비 33,446,618천원)

대지면적

10,827㎡

건축연면적

26,849.93㎡

건설개요

유형	호수 (규모별)	공급면적 (㎡)	전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)
합계	374
행복 (건설)	374	46.71	29.96	16.75

규모별(형별)로 구분 작성

추진계획

- 지구지정 : 2004년 11월

- 개발계획 : 2004년 11월

- 실시계획 : 2005년 12월

- 사업승인 : 2014년   7월

- 착    공 : 2013년 10월

- 준    공 : 2015년  9월

기타사항

※ 첨부 : 사업승인서 사본 1부

’14년 행복주택 신규 건설(사업승인) 계획

서울시

구분

내용

비고

대지위치

서울특별시 서초구 내곡동, 신원동, 염곡동, 원지동 일원

사업명

내곡지구 도시형생활주택 건설공사

사업기간

2013. 9월 ~ 2015. 8월

(추정)사업비

총 12,119,659천원

(대지비 3,593,659천원, 건축비 8,526,000천원)

대지면적

1,330㎡

건축연면적

5,776.09㎡

건설개요

유형	호수 (규모별)	공급면적 (㎡)	전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)
합계	87	3,151.46	1,981.67	1,169.79
행복 (19A)	3	31.41	19.85	11.56
행복 (20A)	40	32.80	20.52	12.28
행복 (21A)	4	32.85	21.13	11.72
행복 (21A1)	20	34.42	21.58	12.84
행복 (29A)	20	46.27	29.26	17.01

규모별(형별)로 구분 작성

추진계획

- 사업승인 : 2014년 4월

- 착    공 : 2014년 4월

- 준    공 : 2015년 8월 예정

기타사항

※ 첨부 : 사업승인서 사본 1부

’14년 행복주택 신규 건설(사업승인) 계획

서울시

구분

내용

비고

대지위치

서울특별시 구로구 천왕2택지개발지구 일원

사업명

천왕2지구 도시형생활주택(A) 건설공사

사업기간

2013. 9월 ~ 2016. 2월

(추정)사업비

총 29,885,451천원

(대지비 15,898,060천원, 건축비 13,987,391천원)

대지면적

4,826.00㎡

건축연면적

11,245.38㎡

건설개요

유형	호수 (규모별)	공급면적 (㎡)	전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)
합계	181	7,833.60	4,986.58	2,897.02
행복 (20A)	56	33.00	20.57	12.43
행복 (20B)	21	32.60	20.61	11.99
행복 (32A)	48	50.85	32.31	18.54
행복 (32B)	47	51.34	32.64	18.70
행복 (35A)	9	55.24	35.21	20.03

규모별(형별)로 구분 작성

추진계획

- 사업승인 : 2014년 9월

- 착    공 : 2014년 9월

- 준    공 : 2016년 2월 예정

기타사항

※ 첨부 : 사업승인서 사본 1부

’14년 행복주택 신규 건설(사업승인) 계획

서울시

구분

내용

비고

대지위치

서울특별시 구로구 천왕2택지개발지구 일원

사업명

천왕2지구 도시형생활주택(B) 건설공사

사업기간

2013. 9월 ~ 2015. 4월

(추정)사업비

총 23,044,464천원

(대지비 10,901,210천원, 건축비 12,104,254천원)

대지면적

3,321㎡

건축연면적

10,148.89㎡

건설개요

유형	호수 (규모별)	공급면적 (㎡)	전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)
합계	138	6,142.03	4,052.99	2,089.04
행복 (20)	45	30.45	19.83	10.62
행복 (22)	5	34.64	22.23	12.41
행복 (31)	50	46.89	31.06	15.83
행복 (34)	5	50.83	33.63	17.20
행복 (40A)	28	60.67	40.28	20.39
행복 (40B)	5	60.17	40.10	20.07

규모별(형별)로 구분 작성

추진계획

- 사업승인 : 2014년 9월

- 착    공 : 2014년 9월

- 준    공 : 2015년 12월 예정

기타사항

※ 첨부 : 사업승인서 사본 1부