정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2011-51	담당부서 작성자	도시교통본부/주차계획과 임종민 / 2133-2363
정 책 명	대중교통 광역환승센터 건립(완료) - 도봉산역 광역환승센터 건설사업
사업개요	○ 추진배경 - 대중교통 환승체계 구축 종합계획(시장방침 제579호, ′07.10.30) - 의정부축 서울시계인 기존 도봉산역 평면주차장을 환승시설과 편의시설을 갖춘 광역환승센터로 건립하여 대중교통이용을 활성화하고, 도봉로 및 도심의 교통여건을 개선하기 위함 ○ 주요내용 - 도봉산역 광역환승센터 건립 ○ 추진기간 : 2008.4. ~ 2013.6. ○ 총사업비 : 36,846백만원
추진경과	□ 추진경과 ○ 2007.10. : 대중교통 환승체계 구축 종합계획(시장방침 제579) ○ 2008. 4. : 도봉산역 광역환승센터 건립 세부 추진계획 수립 ○ 2008.10.~2009.10. : 건축디자인심의, 건설기술심의, 교통영향분석개선대책 심의 등을 거쳐 기본설계 완료 ○ 2009.10. : 시공사 선정(삼환기업(주) 외 1) ○ 2010. 1. : 개발제한구역 관리계획(변경) 승인공고 ○ 2010.11. : 도봉산구 건축인허가 협의 완료(공용건축물 특례) ○ 2010.11. : 공사착공 ○ 2013. 4. : 공사준공 ○ 2013. 6. : 공사완료공고 및 주차장 사용개시 공고 ○ 2014. 1. : 관제시스템 등 시설물 하자 보수