정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2011-80	담당부서 작성자	도시안전본부/도로계회과 이성주 / 2133-8083
정 책 명	응봉교 재설치
사업개요	○ 추진배경 - 서울 동․북부 지역과 강남 주간선 도로인 언주로와 연결되는 성수대교 축의 차로수 불균형으로 발생되는 응봉교 일대 교통 병목현상을 해결함으로서 지역간 원활한 교통처리체계를 정립하고자 함. ○ 추진기간 : 2008.10.20 ~ 2015.12.31 ○ 총사업비 : 78,536백만원 ○ 주요내용 - 확 장 : 폭 4차로 → 6차로, 연장 633m - 성능개선 : DB-18 (기존) → DB-24
추진경과 및 사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 01.05.03 : 응봉교 확장 방침(도로계획과) ○ 03.02.28 : 기본설계 용역 완료 ○ 07.12.18 : 과업 완료보고(교량형식 재검토) - 도시기반시설본부 본부장 천석현, 시설국장 이광세, 토목부장 박종웅, 터널건설과장 김영수, 주무관 이석우 ○ 08.02.20 : 실시설계 용역 완료 ○ 10.04 : 중랑천 횡단 가설교량 설치 ○ 11.12 : 주경간부(중로아치교) 교량 시공 - 도시기반시설본부 본부장 조성일, 시설국장 이광세, 터널건설과장 명경출, 주무관 이석우, 주무관 손준호 ○ 13.10 : 시점부(1구간) 왕십리방향 시공 - 도시기반시설본부 본부장 조성일, 시설국장 이광세, 터널건설과장 명경출, 주무관 이석우, 주무관 조현형 ○ 14.12 : 2단계 교통우회(1구간+3차 가설교량) - 도시기반시설본부 본부장 조성일, 토목부장 노우성, 터널건설과장 권혁대, 주무관 손준호

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능