건설정보관리시스템(One-PMIS) 운영지침

신․구조문 대비표

현   행

개  정  안

제1장 총칙

제2조(시스템의 기본기능) 시스템은 건설사업의 공정관리, 공정진척보고(일일/주간/월간), 전자문서(업무지시 및 보고), 웹카메라 운영, 게시판, 수행실적평가, 준공도면입력 등의 기능을 가진다.

제3조(관련법령) 관련법령은 다음과 같다.

①~⑤  (생  략)

⑥ 행정업무의 효율적 운영에 관한 규정

<신   설>

제4조(정의) (생  략)

①  (생  략)

② “시스템 사용자(이하 사용자)” 란 시스템 등록대상 사업의 발주처 공사담당, 시공자, 감리자, 민자사업시행자 등 ID를 규정에 의하여 발급받아 시스템을 사용하는 자이다.

③ “업체등록” 이란 계약된 시공사 및 감리회사를 시스템에 등록하는 것을 말한다.

④~⑥ (생  략)

제5조(업무흐름도)  (생  략)

제6조(정보연계)

①  (생  략)

② 시스템 연계 구성은 [별표01] 과 같다

제7조(적용범위)

①  (생  략)

② 장/단기 공사는 시스템 내 공정계획 및 실적을 입력·관리하여야 하며, 장기공사는 공정보고 및 수행실적평가 등록 의무대상이다.

<신   설>

③ 장기/단기 공사 기준

도급비	공사기간	공사구분	비 고
5억이상	1년이상	장기공사
5억이상	1년미만	공사담당판단	장기공사관리 권고 ex) 1.시가지 철거공사 2.수해복구공사
5억미만	1년이상
5억미만	1년미만	단기공사

④ 사업의 특성 상 시스템 활용 효과가 미미한 사업은 관리자와 협의하여 사업등록을 하지 않을 수 있다. (ex. 무대 연출, 보일러 설치, 사무실 칸막이 설치, 초단기간 사업 등)

제2장 책임과 권한

제8조(시스템 관리자)

①  (생  략)

② 관리자는 입력자료의 정확성 및 정시성 유지를 위해 상시 모니터링을 실시하고 사용자에게 시정지시를 취할 수 있다.

제9조(시스템 사용자)

①  (생  략)

② 사용자는 입력자료의 정확성 및 정시성, 최신성을 유지하여야 한다.

제3장 시스템 운영

제11조(운영방법)

①․②  (생  략)

③ 관리자는 사용자들의 시스템 사용능력 향상을 위해 정기(월별) 집합교육 실시 및 상시 사이버교육을 제공한다.

제13조(만족도조사) 시스템 운영 중 성능, 기능개선, 추가사항 등 사용자의 만족도를 필요시에 조사할 수 있다. 시기와 방법은 필요시 구현한다.

제14조(기능개발 및 관리)

①  (생  략)

② 사용자의 신규기능 개발요구 시 업무절차는 [별표02]와 같다.

③~④ (생  략)

제15조(운영평가)

①~③  (생  략)

④ 운영평가 대상 및 평가항목(안)은 [별표03]과 같다.

제4장 사용자 보안관리

제17조(사용자 ID 및 비밀번호 관리)

①~④  (생  략)

⑤ 중복된 ID는 등록이 불가하며, ID 및 비밀번호 찾기가 가능하다.

<신  설>

<신   설>

<신   설>

<신   설>

<신   설>

제5장 전자문서

제18조(관련규정)  (생   략)

제19조(전자문서 관리 및 운영) ① 시공 및 감리는 전자문서의 기안・결재・발송・수신이 가능하며, 담당공무원은 행정정보연계를 통한 기안문 전송이 가능하다.

②~⑥  (생  략)

제6장 공정관리

제20조(용어정의)

①~④  (생  략)

<신   설>

<신   설>

제21조(공정계획의 작성) ① 착공 후 7일 이내에 사용자(공사담당, 시공자, 감리자)는 시스템 내 공정관리 작업기준을 관리자와 협의해야 한다.

②~③  (생  략)

④ 공정계획 최소작업 단위 권고기준은 [별표04] 와 같다.

⑤ 사용자가 착공 시 제출하는 예정공정표는 작업분류체계를 준수하여 PERT/CPM에 의하여 작성한다.

제22조(공정보고) ① 사용자는 One-PMIS로 공정보고를 해야하며,『일일작업보고』,『주간업무보고』,『월간업무보고』로 구성된다.

② 업무보고 실적기준 및 보고기한은 다음과 같다.

가. 『일일작업보고』

1) 전일실적/금일계획 : 금일 09:00 까지

2) 금일실적/명일계획 : 금일 24:00 까지

→현장여건에 따라 1), 2) 중 택일

나~다 (생   략)

<신   설>

제7장 안전관리

제23조(안전점검 통합관리) ① 안전점검 통합관리기능은 공사장 점검 및 조치결과를 DB화하여 분야별, 점검별, 공종별 등 다양한 조건으로 조회가 가능한 정보공유 서비스이다.

② 안전점검 통합관리 항목은 [별표05]와 같다.

제24조(안전관련 콘텐츠 제공)  (생  략)

제8장 수행이력관리

제25조(목적)  (생  략)

<신   설>

제26조(수행이력관리) ① 발주처 공사담당은 공사과정에서 실시설계 완성도와 시공 및 감리의 사업수행실적을 평가해야 한다.

② (생   략)

③ 수행실적평가 시기는 공정율 30%, 60% 및 준공 전이며, 필요시 추가평가가 가능하다.

제9장 웹카메라

제27조(용어정의)  (생  략)

제28조(웹카메라 설치 및 운영)

①~④ (생  략)

<신   설>

제10장 건설알림이

제29조(용어정의)  (생략)

<신   설>

제30조(공개항목) 건설알림이를 통해 대시민 공개되는 정보 항목은 다음과 같다.

가. 공사개요

나. 공정계획 및 실적

다. 작업내용

라. 공정사진

마. 계약현황

바. 집행현황

사. 공사참여자

아. 웹카메라

<신   설>

제11장 운영실무협의회

제31조(목적)  (생략)

제32조(구성) 협의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.

가~다.  (생   략)

라. 시공자 및 감리자

제33조(기능)  (생략)

제12장 준공도면 전산화

제34조(목적) 준공도면 전산화는 기관별 분산 관리되던 시설공사 준공도면에 대한 전산 통합관리 체제를 구축하여 도면 분실에 대비하고 효율적인 시설물 유지관리를 위함이다.

<신   설>

제35조(준공도면 관리절차) 준공도면 관리 업무처리 절차는 다음과 같다.

준공검사 요청 시 준공도면관리 시스템에 입력 (시공사)	⇨	준공조서 행정정보연계 결재 후 계약부서 통보 (공사담당)	⇨	도면확인 후 준공금 지급 (계약담당)

<신   설>

<별 표 / 서 식>

[별표 01] 정보연계 상세내역 및 연계구성도

[별표 02] 개발요청 업무절차

[별표 03] 운영평가 항목

[별표 04] 공정표 최소작업 단위 권고기준

[별표 05] 안전점검 통합관리 항목

[서식 01] 신규기능 추가개발 요청서

[서식 02] 신규기능 추가개발 검토 결과서

제1장 총칙

제2조(시스템의 기본기능) 시스템은 건설사업의 공정관리, 공정진척보고(일일/주간/월간), 전자문서(업무지시 및 보고), 안전관리, 웹카메라 운영, 게시판, 수행실적평가, 준공도면입력 등의 기능을 가진다.

제3조(관련법령) 관련법령은 다음과 같다.

①~⑤  (생  략)  (현행과 같음)

⑥ 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정

⑦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침

제4조(정의)  (생  략)  (현행과 같음)

①  (생  략)  (현행과 같음)

② “시스템 사용자(이하 사용자)” 란 시스템 등록대상 사업의 공사관리관, 시공자, 건설사업관리기술자, 민자사업시행자 등 ID를 규정에 의하여 발급받아 시스템을 사용하는 자이다.

③ “사용자 등록” 이란 사용자가 시스템에 가입하는 것을 말한다.

④~⑥ (생  략) (현행과 같음)

제5조(업무흐름도) (생  략) (현행과 같음)

제6조(정보연계)

①  (생  략)  (현행과 같음)

② 삭제

제7조(적용범위)

①  (생  략)  (현행과 같음)

② 장기공사는 시스템 내 공정계획 및 실적을

입력·관리하여야 하며, 공정보고 및 수행실적평가 등록 의무대상이다.

③ 단기공사는 조달청 계약 시스템 등과 연계를 통해 관리자가 사업을 등록한다.

④ 장기/단기 공사 기준

도급비	공사기간	공사구분	비 고
10억이상	1년이상	장기공사	-관리자의 판단 또는 공사관리관 요청시 장기/단기공사로 전환가능
10억이상	1년미만	단기공사
10억미만	1년이상
10억미만	1년미만

④ 삭제

제2장 책임과 권한

제8조(시스템 관리자)

①  (생  략)  (현행과 같음)

② 관리자는 시스템 입력자료의 정확성 및 정시성 유지를 위해 상시 모니터링을 실시하고 사용자에게 시정조치를 취할 수 있다.

제9조(시스템 사용자)

①  (생  략)  (현행과 같음)

② 사용자는 시스템 입력자료의 정확성 및 최신성을 유지하여야 한다.

제3장 시스템 운영

제11조(운영방법)

①․②  (생  략)  (현행과 같음)

③ 관리자는 사용자들의 시스템 사용능력 향상을 위해 정기 집합교육 및 상시 사이버교육을 제공한다.

제13조(만족도조사) 시스템 운영 중 성능, 기능개선, 추가사항 등 사용자의 만족도를 필요시에 조사할 수 있다. 시기와 방법은 필요시 정한다.

제14조(기능개발 및 관리)

①  (생  략)

② 사용자의 신규기능 개발요구 시 업무절차는 [별표01]와 같다.

③~④ (생  략)

제15조(운영평가)

①~③  (생  략)  (현행과 같음)

④ 운영평가 대상 및 평가항목(안)은 [별표02]와 같다.

제4장 사용자 보안관리

제17조(사용자 ID 및 비밀번호 관리)

①~④  (생  략)  (현행과 같음)

⑤ 중복된 ID는 등록이 불가하며, ID 찾기 및 비밀번호 초기화가 가능하다.

제5장 사업일반관리

제18조(사업생성) 사용자는 착공전 사업등록 및 연결을 통해 사업 생성을 해야 한다. 단, 단기사업은 관리자가 사업을 등록한다.

제19조(관리항목) 사용자는 공사개요, 공정계획 및 실적, 계약현황 등 공사정보의 정확성을 위해 최신 자료 등을 입력․ 관리하여야 한다.

제20조(기간관리) 사용자는 공사기간, 진행상황 변경, 설계변경 발생시 변경사항을 시스템에 반영하고, 증빙자료를 등록해야 한다.

제21조(담당변경) 업무변경 및 인사이동시 기존 사용자는 해당 사업의 연결해지 하고, 신규 담당자는 사업 연결해야 한다.

제6장 전자문서

제22조(관련규정)  (생  략)  (현행과 같음)

제23조(전자문서 관리 및 운영) ① 시공자 및 건설사업관리기술자는 전자문서의 기안・결재・발송・수신이 가능하며, 담당공무원은 행정정보연계를 통한 기안문 전송이 가능하다.

②~⑥  (생  략)  (현행과 같음)

제7장 공정관리

제24조(용어정의)

①~④  (생  략)  (현행과 같음)

⑤ “공정관리”란 건설공사가 정해진 공사기간내에 시방서, 도면 등에 따른 품질을 확보하여 완성될 수 있도록 공정진행 과정을 관리하는 것을 말한다.

⑥ “자원관리”란 건설공사 진행과정에 투입되는 인력, 자재, 건설기계 등을 관리하는 것을 말한다

제25조(공정계획의 작성) ① 착공 후 7일 이내에 시공자와 건설사업관리기술자는 시스템 내 공정관리 작업기준을 공사관리관과 협의하여 공정계획 등을 입력하여야 한다.

②~③  (생  략)  (현행과 같음)

④ 삭제

⑤ 삭제

제26조(공정보고) ① 시공자와 건설사업관리기술자)는 공정보고시 시스템을 사용하여야하며,『일일작업보고』,『주간업무보고』,『월간업무보고』로 구성된다.

② 공정보고 실적기준 및 보고기한은 다음과 같다.

가. 『일일작업보고』

1) 작업전(전일실적/금일계획) : 금일 09:00 까지

2) 작업후(금일실적/명일계획) : 금일 24:00 까지

→시공자와 건설사업관리기술자는 현장여건에 따라 1), 2) 중 택일

나~다 (현행과 같음)

③ 공사관리관은 시공자와 건설사업관리기술자가 공정보고를 기한내 보고토록 조치한다.

제8장 안전관리

제27조(안전점검 통합관리) ① 안전점검 통합관리기능은 건설사업 관련 안전점검 및 조치결과를 DB화하여 분야별, 점검별, 공종별, 기계별 등 다양한 조건으로 조회가 가능한 정보공유 서비스이다.

② 안전점검 통합관리 항목은 [별표03]과 같다.

제28조(안전관련 콘텐츠 제공)  (현행과 같음)

제9장 이력관리

제29조(목적)  (생  략)  (현행과 같음)

제30조(이력관리) 공사관리관, 시공자, 건설사업관리기술자는 수행이력 및 안전사고와 관련 최신 자료를 입력․관리하여야 한다.

제31조(수행이력관리) ① 공사관리관은 공사과정에서 실시설계 완성도와 시공자 및 건설사업관리기술자의 사업수행실적을 평가한다.

② (생  략)  (현행과 같음)

③ 수행실적평가 시기는 공정율 30%, 60%, 95%이며, 필요시 추가 평가할 수 있다.

제10장 웹카메라

제32조(용어정의)  (생  략)  (현행과 같음)

제33조(웹카메라 설치 및 운영)

①~④ (생  략)  (현행과 같음)

제34조(세부 운영) 그 밖의 세부적인 웹카메라 운영에 관한 사항은 서울시 영상정보처리기기 운영관리 지침 등을 따른다.

제11장 건설알림이

제35조(용어정의) (생  략)  (현행과 같음)

제36조(관련규정) 건설알림이를 통해 시민에게 공개되는 정보는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 「개인정보보호법」에 따른다.

제37조(공개항목) 건설알림이를 통해 대시민 공개되는 정보 항목은 다음과 같다.

가. 공사개요

나. 공정계획 및 실적

다. 작업내용

라. 공정사진

마. 계약현황

바. 집행현황

사. 공사참여자

아. 설계변경·공기연장이력

자. 그 외 시스템 내 자료중 시민 공개가 필요한 정보

제12장 운영실무협의회

제38조(목적) (생  략)  (현행과 같음)

제39조(구성) 협의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.

가~다. (생  략)  (현행과 같음)

라. 시공자 및 건설사업관리기술자

제40조(기능) (생  략)  (현행과 같음)

제13장 자료관리

제41조(목적) “자료관리”는 건설사업 수행 및 준공시 생산한 도서·도면 등 각종 자료를 시스템에 등록하여 관리 및 공유하기 위한 것을 말한다.

제42조(준공도면 전산화) 준공도면 전산화는 기관별 분산 관리되던 건설공사 준공도면을 시스템에 등록하여 도면 분실에 대비하고 효율적인 시설물 유지관리를 위함이다.

제43조(준공도면 관리절차) 준공도면 관리 업무처리 절차는 다음과 같다.

준공검사 요청 (시공자⇒발주청)	⇨	One-PMIS 내 준공도면 등록 (시공자)	⇨	도면입력 확인 후 준공금 지급 (계약담당)

제44조(설계변경, 공기연장) 건설사업관리기술자는 설계변경, 공기연장 등이 발생한 경우 시스템에 관련 자료를 등록・관리하여야 한다.

<별 표 / 서 식>

[별표 01] (삭제)

[별표 01] 신규개발 및 기능개선 요청 업무절차

[별표 02] 운영평가 항목

[별표 03] 안전점검 통합관리 항목

[별표 04~05] (삭제)

[서식 01] (현행과 같음)

[서식 02] (현행과 같음)

[별표 01] 시스템 구성도 및 연계흐름 상세   (삭제)

가. 시스템 구성도

나. 연계흐름 상세(서울시 업무관리시스템과의 전자문서 수․발신)

종류	One-PMIS(건설정보관리시스템)	유통방향	업무관리시스템
	기능설명
행정정보연계	① [담당공무원] 기초자료 작성	→	② [담당공무원] 행정정보연계 메뉴에서 기안, 결재
	④ [시공, 감리] 수신 및 접수	←	③ 결재결과 전송
	① [담당공무원] 기초자료 작성	→	② [담당공무원] 행정정보연계 메뉴에서 기안, 결재, 발송 (공무원간 송수신)

<현  행>

[별표 02] 개발요청 업무절차 등(신청서, 검토결과 의견서 양식)

절 차	관련부서	내 용	비 고
개발 요청	업무주관부서 → 건설정보관리과	부서별 신규기능 추가 필요 시 신청서 작성하여 제출	개발요구신청서 서식 1)
타당성 검토	건설정보관리과	신청 건에 대한 타당성 및 소요예산 산출
검토결과서 송부	건설정보관리과 → 업무주관부서	타당성 검토 결과서 송부	검토결과서 서식 2)
신규 개발	건설정보관리과	프로그램 개발 및 실무 적용	예산 소요 시 편성 후 추진

<개정안>

[별표 01] 신규개발 및 기능개선 요청 업무절차

절 차	관련부서	내 용	비 고
개발 요청 (기능개선)	업무주관부서 → 총무부	부서별 신규기능 추가 필요 시 신청서 작성하여 제출	개발요구신청서 서식 1)
타당성 검토	총무부	신청 건에 대한 타당성 및 소요예산 산출
검토결과서 송부	총무부 → 업무주관부서	타당성 검토 결과서 송부	검토결과서 서식 2)
신규 개발	총무부	프로그램 개발 및 실무 적용	예산 소요 시 편성 후 추진

<현행>

[별표 03] 운영평가 항목

운영평가 항목
발주처	감리자, 시공자
· 시스템 이용실적 · 시스템 접속현황 · 부서장 관심도 · 공정산정기초 및 개정관리 · 자료입력 정확성 · 참여자현황 관리 · 수행실적평가 성실도	· 시스템 이용실적 · 공정관리 기능 활용성 · 공정보고 적시성 · 공정산정기초 및 개정관리 · 웹카메라 관리 · 자료입력 정확성 · 수행실적평가 성실도

<개정안>

[별표 02] 운영평가 항목

운영평가 항목
발주청	건설사업관리기술자, 시공자
· 시스템 이용실적 · 시스템 접속현황 · 부서장 관심도 · 공정산정기초 및 개정관리 · 자료입력 정확성 · 참여자현황 관리 · 수행실적평가 성실도	· 시스템 이용실적 · 공정관리 기능 활용성 · 공정보고 적시성 · 공정산정기초 및 개정관리 · 웹카메라 관리 · 자료입력 정확성 · 수행실적평가 성실도

[별표 04] 공정관리 최소작업 단위 권고기준   (삭제)

구 분			최소작업단위 (권고기준)	비 고
도 급 비	5억 미만		1~30
	5억 ~ 200억		30~150
	200억 초과		150초과
공사기간	6개월 미만		1~30
	6개월 ~ 12개월		30~150
	12개월 초과		150초과
단기/장기 공사	단기공사		1~30
	장기 공사	일반	30~150
		대형	150초과

<현행>

[별표 05] 안전점검 통합관리 항목

	구 분
	일반항목	점검분야	세부점검분야
내 용	▸9개 항목 • 점검일자 • 발주부서 • 문서번호 • 점검자 • 지적사항 • 점검분야 • 점검결과 • 세부점검명 • 모범사례	▸20개 분야 • 추락 재해예방 • 가설통로 안전 • 낙하 재해예방 • 중량물취급 안전 • 거푸집동바리 붕괴 재해예방 • 흙막이붕괴 재해예방 • 터널붕괴 재해예방 • 사면붕괴 재해예방 • 감전 재해예방 • 기계기구 안전 • 건설기계 안전 • 작업장 조도확보 • 화재/폭발/질식 재해예방 • 시공계획 및 승인 • 개인보호구 착용관리 • 작업환경 개선 • 기술검토 • 풍수해예방 • 제설안전 • 기타 안전관리	▸2개 분야 • 정기점검(불시) • 특별점검

<개정안>

[별표 03] 안전점검 통합관리 항목

	구 분
	일반항목	점검분야	세부점검분야
내 용	▸9개 항목 • 점검일자 • 발주부서 • 문서번호 • 점검자 • 지적사항 • 점검분야 • 점검결과 • 세부점검명 • 모범사례	▸20개 분야 • 추락 재해예방 • 가설통로 안전 • 낙하 재해예방 • 중량물취급 안전 • 거푸집동바리 붕괴 재해예방 • 흙막이붕괴 재해예방 • 터널붕괴 재해예방 • 사면붕괴 재해예방 • 감전 재해예방 • 기계기구 안전 • 건설기계 안전 • 작업장 조도확보 • 화재/폭발/질식 재해예방 • 시공계획 및 승인 • 개인보호구 착용관리 • 작업환경 개선 • 기술검토 • 풍수해예방 • 제설안전 • 기타 안전관리	▸2개 분야 • 정기점검(불시) • 특별점검

<서식 01~02 현행과 같음>

[서식 01] 신규기능 추가개발 요청서

- 건설정보관리시스템(One-PMIS) 내 -

신규기능 추가개발 요청서

요청자	기 관 명		부 서 명
	직 위		성 명
	휴대전화		요청일자
요청 사항	목 적
	개 요
	현황 및 문 제 점
	상세내용	※ 업무흐름, 사용대상자, 개선사항, 개선효과 등
비고

[서식 02] 신규기능 추가개발 검토 결과서

- 건설정보관리시스템(One-PMIS) 내 -

신규기능 추가개발 검토 결과서

요청자	기 관 명		부 서 명
	직 위		성 명
	휴대전화		요청일자
요청 내용	사업개요
	상세흐름
검토 결과	가능여부	추가개발 가능( ) 불가능( ) 장기검토( )
	소요예산
	검토결과
비고