예산변경 요구서

□ 요구부서 : 관광체육국 체육진흥과

□ 변경금액 : 34,290천원(예산액 증감 없음)

○ 변경 내역

(단위 : 천원)

예산과목				예산액	증감내역		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감
시민생활체육 진흥발전	생활체육 인프라확충(체육진흥기금)	계		1,500,000	34,290	34,290	1,500,000
		노원구 야구장건립	시설비 (401-01)	1,465,500	34,290	-	1,499,790
			감리비 (401-02)	25,500	-	25,500	0
			시설부대비 (401-03)	9,000	-	8,790	210

□ 예산변경 사유

○ 구 자체 감독업무 수행으로 감리비 절감(25.5백만원)

○ 구장 균형을 맞추기 위해 1․3루 거리를 동일하게 조성하여 구장 규모 확장에 따라 인조잔디 물량 증가(6,039㎡→6,840㎡)
※ 당초 : 1루 : 78.99m, 3루 : 84.52m → 1, 3루 : 84.52m

○ 시설이용자 등 안전을 위해 펜스 높이를 상향 조정하여 그물망펜스 물량 증가

2016년 12월  일

관광체육국장  김 의 승 (인)