< 관리카드 : 전북 군산시-1>

월명공원1 수해복구사업(쌍떼빌@산림피해 복구공사)

(소방방재청에서 통보된 호우피해 복구내역의 시설명 기재: 월명공원 1)

□ 사업개요

ㅇ 위    치：군산시 소룡동 산6-11번지 일원

ㅇ 피해현황：산림피해 4,686㎡

※ 월명공원 1

ㅇ 복구물량：사방댐 1개소, 사면복구, 옹벽, 암거, 등산로복구 등

ㅇ 복 구 비：1,586백만원(국비 793, 도비 317, 시비 476)

ㅇ 사업기간：2013. 2. 28 ～ 2013. 6. 27(절대공기 120일)

ㅇ 시 행 청：군산시청 산림녹지과

ㅇ 시 공 사：(유)숲으로

□ 추진현황

ㅇ 월별 추진계획

공종 월	사업량	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
․산지사방
․구조물공
․배수공

ㅇ 추진실적 : 75%(’13.05.27일 현재 공사추진공정 기준)

- 산지 사방공 : 돌망태, 돌수로, 격자형사면보강, 소일네일 완료

- 구 조 물 공 : 반중력식옹벽, L형측구옹벽, 사방댐 본체완료

- 배   수  공 : PC박스, VR관 완료

ㅇ 향후 추진계획

- 주요공종 완료 : 6월 초

- 공사준공      : 6월 중순

□ 내년 우기대비 특별수방대책

ㅇ 복구사업 현장 적극 독려로 조기복구 완료

ㅇ 사업 및 관리 감독 철저로 피해재발 방지

관리책임	구분	담당과장	담당계장	공사담당
	직급, 성명	행정사무관 박진석	녹지주사 노남섭	시설서기 이중조
	전화번호	063-454-2940	063-454-2981	063-454-2982