문서번호	급수운영과-11872
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
협 조
	행정지원과장
	시설관리과장
	시설관리팀장
	주무관

“월간 공정보고회”를 통한

공사현장 안전관리 강화 및 청렴도 향상 추진계획

2015. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

“월간 공정보고회”를 통한

공사현장 안전관리 강화 및 청렴도 향상 추진계획

공정보고회 정례화를 통하여 공사장 안전관리 강화와 공사대금 지급확인 및  현장에서 문제점에 대한 선제적 해결로 양질의 품질확보와 청렴도 제고에 만전을 기하고자 함

□ 추진목적

❍ 건설분야 부조리 예방 및 공사 품질 확보

❍ 공사장 안전관리 강화 및 현장 애로사항 청취

□ 추진계획

❍ 추진방법 : 월간 공정보고회 개최

❍ 개최주기 : 매월 1회 (첫째주 수요일)

❍ 장    소 : 사업소 2층 회의실

❍ 대    상 : 단위공사 7건

(단위 : 건)

구 분	계	송배수관 정비공사	배급수관정비공사	비고
계	7	3	4
급수운영과	2	-	2
시설관리과	5	3	2

※ 송배수관정비공사 1건 설계중

❍ 참 석 자 (총 21명)

- 사업소(11명) : 급수운영과장, 시설관리과장, 각과 주무팀장, 공사담당

- 감   리(3명) :  시설관리공단 감독

- 업   체(7명) :  현장소장

□ 공정보고회 내용

〈공사 품질 및 안전관리 분야〉

❍ 공사 추진 실적 및 공정 계획 보고

- 공사 추진실적 점검 및 향후 공정계획 검토

❍ 공사현장별 안전관리 계획 발표

- 월별, 업체별 자체 안전관리 계획 수립 발표를 통한 안전관리 강화

〈청렴도 분야〉

❍ 계약업체 애로사항 청취

- 현장별 현안사항 보고 및 조치계획 토의

- 기타 문제점 및 건의사항 청취

❍ 노무비 지급, 공사대금 지급 등 관련사항 보고

- 대금e 바로시스템을 통한 노무비 지급 철저

- 선급금 등 대금지급 관련사항

- 불법․불공정 하도급 근절 관련사항 등

❍ 제도 변경사항 안내 및 교육사항 전파

- 건설공사 관련제도 변경사항 안내

- 품질, 안전 등 기타 점검대비 사항 교육 및 점검결과 사례전파

□ 기대효과

❍ 현안사항 및 업체 애로사항 해소를 통한 청렴도 제고

❍ 건설분야 부조리 예방 및 협력 체계 구축

❍ 관련제도 변경사항에 대한 신속한 전파 및 교육

붙임 : 단위공사 현황 1부.

□ 단위공사 현황

구분	공 사 명	사업비 (백만원)	공사개요	추진실적 (‘15.6.22기준)	비고
	총 계 (7건)	10,456	D=100~800mm L=9,504m
송배 수관	소 계	4,636	D=800mm L=2,050m
	남서울아파트~강남성심병원간 송배수관정비공사	1,500	D=800mm L=600m	서울시건설신기술심의위원회 자문진행중	시설관리과
	당산3가 393-2~당산동1가 309간 송배수관정비공사	1,500	D=800mm L=450m	교통대책심의
	신길주유소앞~우신초등학교간 송배수관정비공사(이월공사)	1,636	D=800mm L=1,000m	정비 L=300m (25%)
배급 수관	소 계	5,820	D=100~300mm L=7,454m	D=100~300mm L=2,050m	진도(29%)
	미성동 1685~733호간 외 8개소 배급수관 정비공사	1,480	D=100~300mm L=1,709m	정비 L=900m (53%)	급수운영과
	독산동 1019-2~1024-24외 5개소 배급수관 정비공사	1,240	D=100~300mm L=1,580m	정비 L=250m (20%)
	노량진동 50-2~상도동 370-27 외 3개소 배급수관정비공사	1,200	D=200~300mm L=1,491m	정비 L=490m (33%)	시설관리과
	여의도동 33~46 외 3개소 배급수관정비공사	1,900	D=100~300mm L=2,674m	정비 L=500m (20%)

끝.