□ 특별감사 결과 분야별 조치현황

❍  시설안전분야(16건 중 조치완료 : 조치완료 4건, 조치중 :12건)

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	1. 서울대공원 발전계획이 지속적으로 무산되어 공원시설이 노후화되었으므로, 서울대공원 혁신위원회의 실효성 있는 개선방안 마련 및 강력한 추진 필요. - 서울대공원은 개원한지 30여년이 지남에 따라 동물사 등 시설상태가 심하게 노후되어 개선이 시급한 상황이므로 우리시 입장에서 타당성과 실효성 있는 개선방안 마련이 필요	조치중	- 혁신위원회 구성운영 · 14.1~3 분과별회의 총 8회 실시 · 안전개선대책 시장 보고 : 14.3.3. · 비젼수립용역 1차 중간보고:14.5.27. · 비젼수립용역 2차 중간보고:14.7.28. · 서울대공원비젼 시장보고:14.8.20.	혁신위원회 최종 검토회의 : 9월중 최종보고:9월중(예정)	동물기획과 (리모델링 협의회)
			- 동물사리모델링 협의체(TF)구성·운영 ․위원장: 동물원장 동물기획과,시설과 등 7개과 참여	중단기(‘14~’19) 동물사리모델링 단게별 추진계획 마련 토종동물지구(‘14~ ’17)조성방안 협의 실무자협의, 전문가 자문, 시민 의견 수렴
	2. 자체 소각로 운영으로 인한 연간 유지보수 비용이 부담되고 있으므로, 환경청에 허가 받은 의료폐기물 수집운반 업체를 통한 위탁 계약 등 동물사체 처리방법 개선 필요	조치중	소각로 운영 중지 및 폐사체 위탁처리 계획 수립 : ‘14.8.29	위탁처리 업체선정 및 시행 ; 9월예정	동물병원 (이현호)

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	3. 악어방사장은 격리시설이 없고 악어가 있는 상태에서 청소작업을 하고 있어 사육사가 사고위험에 상시 노출되어 있으므로, 접이식 구조물을 설치하여 청소등 작업시에 악어가 사육사에게 접근하지 않도록 격리시설 설치 필요	조치중	2014.8.14. 동양관 악어격리시설 설치완료	-	동물복지과 (유종태) (이광구) 시설과 (이강호)
			남미관 가변형 칸막이 설계완료 및 발주 : 14.8.30	공사완료 :14.10.30 예정
	4. 하마 실내전시장(3번방)은 쇠사슬에 의한 격리만으로 방사장 및 청소, 먹이배급 등을 하는구조로 되어 있어 동물 공격에 의한 위험가능성 상시노출되어 있으므로 하마 실내전시장의 기존 격리실 벽체를 개선하여 수조 청소시에는 동물이 격리실에 머물 수 있도록 구조체 개선 요함.	조치완료	- 벽체 및 계단부분 개선완료:14.8.30	-	동물복지과 (유종태) (차준호)

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	5. 맹수사의 외부 출입문은 사육사가 모든 열쇠를 보유하고 언제든지 사용할 수 있어 부주의로 맹수탈출 위험이 존재하므로, 맹수 방사장 외부출입문의 열쇠는 관리자가 별도관리하고 긴급상황 또는 특별한 경우 사전 승인을 받아 사용하는 시스템 필요 - 위험동물의 출입문 잠금장치는 일반동물과 구별되게 관리	조치완료	○ 외부 문 열쇠 특별관리 - 맹수사 12개소, 곰사 6개소, 퓨마, 재규어사 2개소 ○ 외부 출입문 열쇠를 동물복지과(복지4총괄주무관)이별도 열쇠함 구비 관리하고, 사용시는 사전승인을 받아 사용토록 조치	-	동물복지과 (유종태) (이광구)
	6. 맹수사 사육업무 종사자 이동동선이 맹수격리시설에 노출되어 있고, 맹수가 격리시설 창살 밖으로 손을 내밀어 위해를 가할 수 있으므로 대책 필요 - 단기계획 : 동물 발이 창살 밖으로 나오지 않도록 촘촘한 철망을 추가설치 - 장기계획 : 사육업무 종사자 이동동선과 맹수 격리시설을 복층화	조치중	퓨마, 재규어 격리칸 잔망설치:14.8.7	표범 잔망설치 : 14.9.20 완료예정	동물복지과 (유종태) (이광구)
				종사자 이동동선과 복층화 작업은 향후 각 동물사 리모델링시 검토사항으로 제안 예정

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	7. 맹수사 사육사가 내실에 설치된 먹이투입구를 통해 먹이 투입과정에서 맹수의 발톱 또는 이빨해 의해 위해 가능성이 있으므로 감시창, 먹이투입구는 내측으로 돌출형 창살을 설치하여 맹수의 발톱과 이빨로부터 충분한 이격 확보 필요 - 사각지대가 발생하는 볼록거울 대신 반구형 거울로 교체하며, - 출입문 및 격실문 잠금장치에 안전철판이 설치되지 않거나 미흡하게 설치된 곳은 철판을 충분히 넓게 설치	조치중	- 늑대사 설치완료 : 13.12.22 -맹수사,곰사,제3AF, 코요테 감시창 설치 완료 :14. 5. 1 - 사자사 반구형 거울 설치 완료 :14.8.6.	- 사자, 하이에나, 호랑이 먹이투입구및 – 재규어 푸마사 감시창 설치 : 14.9.30(예정)	동물복지과 (유종태) (이광구)
	8. 코끼리 방사장 이동통로 중간문과 들소사 방사장 격실문은 사육업무 종사자가 직접 들어가 작동하여야 하므로 대동물과 접촉될 우려가 있으므로 - 코끼리 방사장 이동통로 중간문은 원격개폐가 가능하도록, 들소방사장은 외부에서 격실문을 개폐하도록 시설개선 필요	조치중	코끼리 이동통로 중간문 보완 설계 중	설계완료 : 14.9.30(예정) 공사완료 : 14.11.30(예정)	동물복지과 (유종태) 동물연구실 (이명희) 시설과 (이상국)
			들소사 격실문 보완 설계 중	설계완료 : 14.9.30(예정) 공사완료 : 14.11.30(예정)

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	9. 악어사 및 사자사의 관람난간이 낮고 견고하지 않아 추락위험이 있으므로, 관람난간을 높이고 견고한 재질로 교체하고 경고문구 설치 필요	조치중	- 동양관(구름다리) 높이 보강(45㎝) - 경고문 설치 - 14.5.30설치완료		동물복지과 (유종태) (이광구) 시설과 (이상국)
			- 남미관, 사자사 보완공사 설계 중	설계완료 :14.9.30(예정) 공사완료 : 14.11.30(예정)
	10. 낙타사, 들소사, 꼬마동물사, 동물한마당 양몰이 공연장의 관람난간은 유아들 출입이 가능할 정도로 난간의 상하 간격이 넓어 사고발생 위험이 있으므로, 관람난간을 유아들이 출입할 수 없도록 안전철망 등 추가 필요	조치중	꼬마동물사,동물한마당 시설물 정비 ‘14.4.29 공사발주 ‘14.6.1 착공 휀스정비 공사 중 낙타사,들소사 관목 식재 중	- 공사완료 : 14.9.30(예정)	동물복지과 (유종태) 동물기획과(유미진) 시설과 (한상길)

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	11. 조절저수지 넘침수로 입구와 조절저수지 아래 팔각정 쉼터 부근에 출입금지 휀스가 없어 등산객 및 관람객 출입시 안전사고 발생할 수 있으므로 조절저수지와 하부의 부속시설에 출입통제 휀스 설치 필요	조치완료	- 출입통제 휀스설치 완료:14.7.25	-	시설과 (문한성)
	12. 곤충관, 동양관, 남미관 등에 비상구유도등과 대피안내도가 설치되어 있지 않고, 곤충관의 경우 유도표시판이 1층 일부구간의 경우 출입구와 반대방향으로 표시되어 있으므로 - 화재와 정전시를 대비하여 상시전원 비상구유도등 설치 및 방향표시를 현장실정에 맞게 설치 요함.	조치완료	- 곤충관, 동양관, 남미관 비상유도등 (3개) 및 방향표시 (2개) 설치완료 : 14.6.30	-	시설과 (황인공)

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	13. ‘84년 개원이후 현재까지 약30년간 사용되고 있는 동물원 기반시설인 공동구내 난방·소방·잡용수 배관은 노후가 심각하여 난방효율저감 및 송수펌프 동력이 증대되는등 에너지손실도 증가되고 있으므로 - 동물원 내 기반시설인 난방, 소방, 잡용수 배관의 조속한 교체 필요	조치중	- 지하구 관로점검 용역완료; 4.16	- 2015년 본예산 미반영 되었으나 향후 추경예산 등을 확보 하여 보수예정	기반시설안전 추진반 (김형집)
	14. 동양관 유인원 관람실 천장 누수, 대동물관 전면 벽체 콘크리트 탈락, 곰사 건물노후, 맹금사 철창 심각하게 부식, 호주관 방사장은 동물수용이 어려운 수준으로 부식되었으므로 - 동물사 노후 건물을 재건축하거나 리모델링이 필요하고, 동물사별 내부 공간배치도 효율적으로 배치필요	조치중	대동물관 전면 벽체 콘크리트 탈락 조치 완료 :14. 2.18 유인원관 천장누수 완료 : 14.5.2 호주관 철장 보수 완료 : 14.4.20	동양관 천장누수는 대규모 예산이 소요되어 16년까지 예산확보 후 연차적 조치 예정	동물복지과 (유종태)
			곰사설계 완료 및 발주 : 14.8.27	- 곰사 공사완료 : 14.11.30.(예정)
			맹금사 설계 중	설계완료 : 14.8.30(예정) 공사완료 : 14.10.30(예정)

연번	지 적 사 항	조치결과			부 서 (담당자)
		완 료	조치 중
			추진실적	향후계획
3	15. 동물원 내 88대의 CCTV가 설치되어 있으나, 10대는 고장, CCTV 관리와 감시는 담당부서 사육업무 종사자 사무실에서 하고 있어 장애발생시 신속정비 곤란하고, 사육업무 종사자 안전을 위한 맹수사 등에는 미설치 되어 있으므로 - 시스템 구축시 맹수사 등에는 사육사 통로감시와 동물사 출입문이 개방될 경우 경보가 울리면서 녹화가 될 수 있도록 하고, 모든 감시시스템을 통합하고, 유지관리 부서를 전문분야(통신)에서 관리하도록 업무조정 필요	조치중	- CCTV : 통합관제센터 구축계획 수립 : 14.5 - CCTV 통합관제센터 사업 계약 및 착수 : 14.6.17	- 공사완료 : 14.12.23(예정)	기반시설안전 추진반 (최인호)
	16. 동양관 하이에나 산실 외부 출입문, 야행관 박쥐사, 사슴사 맹금사, 가금사, 황새마을 방사장 출입문이 한 개만 설치되어 있어 동물탈출이 우려되므로 - 동물 탈출방지를 위하여 동물사 출입문은 이중문으로 설치 필요	조치중	하이에나 이중문설치 : 14.6.2. 사슴사 이중문 설치 : 14.6.2. - 야행관,맹금사,가금사 황새마을은 설계중	공사완료 : 14.11.30(예정)	동물복지과 (유종태) (이재황) 시설과 (이상국)