문서번호	방재시설부-15454
결재일자	2017.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
협조
	주무관

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

맨홀도색 등 추가공사 실정보고 검토보고

2017. 9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

맨홀도색 등 추가공사 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」의 ‘맨홀도색 등 추가공사’에 대한 실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제17-601호(2017.08.31.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 25,138,300,000원(조경 : 5,918,270,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.10.31.

□ 보고내용

○ 변경사유 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)의 시행중 변경된 사항 및 “서울로” 개장 후 보완을 위한 추가 작업 시행.

(변경 수량 및 변경 사유 참조)

○ 실정보고 내용

맨홀 뚜겅 도색	자연지반 수목 지주목	나뭇잎 문양 시험시공

○ 검토수량 및 변경사유

공 종	당 초		변 경		변경 사유	비고
	단위	수량	단위	수량
맨홀 뚜껑 도색		-	㎡	63.49	만리동광장 및 퇴계로 교통섬에 설치된 각종 맨홀뚜껑을 투수블럭 색상과 유사한 기와진회색으로 도장.
포트 FRP 라이닝 작업		-	개소	6	수생식물용 G-type포트 내부에 전기SMPS함 방수와 Over Flowr공 시설을위해 FRP 라이닝 시설.
나뭇잎 문양 시험시공		-	식	1	고가 상판 비닥에 나뭇잎 문양 새김 가능성을 확인하기 위하여 타공판을 이용해 Sand-Blasting 시험시공
수목 사각 지주목		-	조	49	보행로 자연지반 구간 수목의 전도 등 유지관리를 고려하고 미관을 고려하여 결속선이 없는 지주목 설치.
매몰 처리비(포트)			개소	2	기 설치된 식재포트 2개소 위치에 타 시설물 조성을 위해 기획단의 요청으로 철거후 폐기물 처리.

○ 공사비 증감내용

공 종	단위	변경전			변경후			증 감	비 고
		수량	단가	금 액	수량	단가	금 액
고가도로
사각지주목					1	식	2,194	+) 2,194
식재포트(매몰 처리)					2	개소	5,660	+) 5,660
중량구조물 철거(포트철거)					2	개소	37	+) 37
FRP 라이닝 작업				-	1	식	3,241	+) 3,241
맨홀 도색					63.49	㎡	3,594	+) 3,594
시험제작 및 시공				-
문양 시험 시공					1	식	3,150	+) 3,150
소 계				-			17,876	+) 17,876
직접공사비				-			17,876	+) 17,876
제경비				-			3,524	+) 3,524
공급가액				-			21,400	+) 21,400
부가가치세				-			2,140	+) 2,140
도급 공사비				-			23,540	+) 23,540

○ 신규단가 적용

- 시공사로부터 협의율(90.014%) 적용하여 실정보고 되었으나 별도 협의 후 적용

□ 건설사업관리단 검토의견

“서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)” 중 발생한 추가 보완 사항의 실정보고를 검토한 결과,

-. 사각지주목 : 자연지반 구간의 녹음 풍성화를 위해 당초 설계보다 상향된

규격으로 식재된 수목의 전도를 방지하고 미관을 고려한 신규지주목      설치  : 적합

-. 식재포트(매몰 처리) : 고가 보행로에 설치된 포트 위치에 호기심 화분 및     장미김밥 진입 램프 시설을 위해 포트 철거후 손실 처리  : 적합

-. FRP 라이닝 작업 : 수생 식물용 G-type 포트 6개소 내부에 전기 SMPS함     방수와 Over Flowr공 시설을 위해 FRP 라이닝 시설  : 적합

-.  맨홀 도색 : 만리동광장 및 퇴계로교통섬 포장면에 설치된 상, 하수도 및     교통신호용 맨홀 뚜껑을 투수블럭 색상과 이질감을 줄이기 위해 도색  : 적합

-. 문양 시험 시공 : 고가 상판 바닥에 나뭇잎 문양 새김 가능성을 확인하기     위하여 타공판을 이용해 Sand-Blasting 시험시공 : 적합

항목별 추가 사항이 타당하며 단가 및 수량 산출이 적정하여 실정보고하고 추후  설계변경에 반영 하고자 함.

□ 보고자 의견

○  “서울역 7017 프로젝트 건설공사(조경)” 중 「맨홀도색 등 추가공사」 실정보고에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고, 공사비에 대하여는 신규단가 협의를 통해 재조정하여 향후 설계변경 시 정산조치 하고자 함.

붙 임   건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.