문서번호	동북4구사업단-5330
결재일자	2016.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		선도사업관리팀장	동북4구사업추진반장
협조
	주무관

『문화예술공방 기본계획 수립용역』

준공기한 연기 검토보고

2016.06

도시재생사업본부

(동북4구사업추진반)

『문화예술공방 기본계획 수립용역』

준공기한 연기 검토보고

문화예술공방 조성에 따른 파급효과 극대화는 물론 활성화를 위하여 『플렛폼 창동 61』과 관련한 연계방안 강구 및 내실있는 용역 수행을 위하여 용역 기간을 연장코자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 사 : ㈜아키앤종합건축사무소

□ 용역기간 : 2015.12.12. ~ 2016.6.12.(6개월)

□ 계약금액 : 77,240천원

□ 주요과업내용

○ 창동역～노원역 고가하부 일대 대상지 현황조사

○ 지역․광역적 문화예술자원을 고려한 테마․컨셉 구상

○ 문화예술공방 건축, 조경 디자인 및 경관계획

○ 창동역 및 서울아레나 부지 등을 연계한 동선 및 공간계획

○ 지속적 운영방안, 발전전력 등 마련 및 타당성 분석

Ⅱ		용역 변경 계획

□ 변경내용

○ 용역기간 연장(6개월 연장)

당 초	변 경
2015. 12. 12. ～ 2016. 6. 12	2015. 12. 12. ～ 2016. 12. 12.

○ 계약금액 변경 : 없음

□ 용역기간 연장 사유

○ 문화예술공방 조성후 조속한 활성화를 위하여는 기 설치된『 플렛폼 창동    61』과 연계한 추가 방안 검토 필요

- 플렛폼 창동 61과 연계한 문화예술공방 콘텐츠 구상

○ 차로축소(6차로→2차로) 및 공간점용(철도고가하부) 등에 따른 관계기관    사전협의를 위한 절대시간 부족

- 차로축소(창동역1번출구～마트사거리) - 서울지방경찰청

○ 전문가 의견 수렴 및 예술가 집단 선정을 위한 논의 기간 부족

□ 귀책사유 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조 치 계 획

○ 용역수행 업체로부터 용역기간 연장에 대한 합의각서가 제출 되었고 용역결과물의 내실을 기하기 위하여 용역기간 연장이 필요하다고 판단되므로 계약변경(용역기간 연기)을 시행하고자 함

Ⅳ		향 후 계 획

○ 2016. 06 : 계약변경 의뢰(재무과)

○ 2016. 12 : 용역최종보고 및 준공

따로붙임 : 합의각서 1부.  끝.