문서번호	시설과-8871
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
협 조
	공원운영과장
	재무팀장

『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충 전기공사』준공기한 연기 검토 보고

2015. 11.

『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충 전기공사』

『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충 전기공사』와 관련하여 건축공사 준공기한 연기 함에 따라 후행공사인 전기공사를 아래와 같이 준공기한 연기하고자 보고드림

준공기한 연기 검토 보고

1		개 요

▢ 공 사 명 : 북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충 전기공사

▢ 위    치 : 서울시 강북구 번동 산 28-6번지 일대(북서울꿈의숲)

▢ 공사내용

- 전기 및 소방전기 공사 1식, 기타 부대시설공사1식

▢ 공사기간 : 2015.9.14.~ 2015.12.22.

▢ 도 급 자 : 제일전기건설공사 대표 이상열

▢ 도 급 비 : 금96,137,565원

2		준공연기 검토의견

▢ 선행공사인 건축공사 준공연기 함에 따라 후행공사인 전기공사 절대 부족으로 공사기간 연장하고자 함.

3		추진계획

▢ 준공기한을 연기하고 공사를 추진하고자 합니다.

○ 공사기간 연장

- 당초 : 2015.9.14.~2015.12.22.

- 변경 : 2015.9.14.~2016.03.15.(84일 연장)

▢ 지체상금 부과여부 검토

○ 연기사유 귀책소재 :서울시 중부공원녹지사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.