문서번호	시설과-1165
결재일자	2014.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
협조

『시민의숲 CCTV 구매설치』 납품기한 연기 보고

2014. 04.

동부공원녹지사업소

시설과

『시민의숲 CCTV구매설치』

납품기한 연기 보고

우리사업소에서 추진 중인 『시민의숲 CCTV 구매설치』에 사용되는 자재에 대하여 납품기한 연기 보고 드림

Ⅰ		납 품 개 요

납 품 명 : 시민의숲 CCTV 구매설치

납품기한 : 2014. 04.12

물 품 비 : 139,000,000원(조달수수료 미포함)

납품업체 : ㈜영국전자

Ⅱ		검 토 내 용

연기사유

-  통합관재센터인 서초구청과의 협의지연으로 장비설치 불가하여    납품기한 연장이 불가피 함

납품기한 변경

-  당초 납품기한 : 2014. 04. 12

-  변경 납품기한 : 2014. 04. 30.

지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		처 리 의 견

서초구청과의 협의지연으로 계약부서에 납품기한 연기 요청하고자    함. 끝.