공공사업 감시·평가 결과보고서

사 업 명	로봇과학관 건립공사
사업유형	공사
사업부서	경제정책실 경제정책과	담당자	안성일 (☏2133-5231)
I. 사업개요 ○ 사업근거 - 로봇과학관 건립 기본계획 변경(2018.9.14.) - 로봇과학관 건립 세부 추진계획(경제정책과-18360, 2020.11.25.) - 로봇과학관 건립공사 시행계획(건축부-4903, 2021.3.30.) ○ 사업위치 : 도봉구 창동 1-25 ○ 사업내용 - 지하 1층 ~ 지상 4층, 연면적 6,305㎡ - 로봇 및 인공지능 분야 전시·교육·과학문화 행사 등 ○ 사업기간 : 2021.5.7. ~ 2023.6.6. (1차: 2021.5.7.~2022.5.6.) ○ 사업비: 43,697백만원(2021년 6,732백만원) ○ 계약(협약) 체결 - 계약일 : 2021.4.29. - 시공사 : 율산종합건설㈜ - 계약금액 : 11,530,878천원(1차 5,500백만원) ○ 사업추진 세부(일정) - 2017.8.1. : 로봇과학관 건립 기본 계획 수립 - 2017.10.16. : 투자심사 - 2018.9.14. : 로봇과학관 건립 기본 변경 계획 수립 - 2020.11.25. : 로봇과학관 건립 세부 추진계획 수립 - 2021.2.25. : 계약심의위원회 심의 - 2021.3.4. : 계약심사 - 2021.3.12. : 일상감사 - 2021.3.30. : 발주계획 수립 - 2021.4.8. : 입찰공고(긴급) - 2021.4.29. : 공사 계약

- 2021.5.7. : 공사 착공

- 2021.10.20. 현재 : 공정률 12%

· 지열 공사 중

- 2022.5.6. : 1차 준공예정

Ⅱ. 감시·평가 개요

○ 자료요구일: 2021.3.2.

○ 서류검토일: 2021.3.22.~2021.10.19.

○ 현장확인일: 2021.10.20.(수)

○ 주요감시내용

- 발주 전 사전절차 이행여부(투자심사, 계약심의위원회심의, 계약심사, 일상감사)

- 사업계획서, 입찰 공고문 이행여부

- 설계서, 시방서, 시공계획서 등 이행여부

- 공정관리, 안전관리, 품질관리 등 진행사항

- 하도급 적정여부

- 공사현장 점검

○ 감시·평가자 : 시민감사옴부즈만 문봉호, 조사관 우창원

Ⅲ. 감시평가 결과 지적사항

1. 건설폐기물 반출 전 보관 관리 철저 ………………………   (현지시정)

(1) 현황

○ 폐기물 관리법 제3조의2(폐기물 관리의 기본원칙)②누구든지 폐기물을 배         출하는 경우에는 주변 환경이나 주민의 건강에 위해를 끼치지 아니하도록         사전에 적절한 조치를 하야야 한다.

(2) 문제점

○ 지열공사 추진을 위하여 부지 내 터파기 중 발생된 폐기물 등이 외부에

노출되어 있어 주변 환경 저해요인 발생

(3) 조치의견

○ 시공자, 감리자에게 폐기물 반출 전까지 천막 또는 보양재를 덮어 외부로

노출되지 않도록 조치함.

Ⅳ. 감시평가 결과 처리

- 현지시정 1건

시민감사옴부즈만   문 봉 호 (서명)