문서번호	방재시설부-16811
결재일자	2016.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
정호운		이도헌	10/27 임춘근
협조

가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지) 기본 및 실시설계용역

용역기간 연장 검토보고

2016. 10

도시기반시설본부

(방재시설부)

가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지) 기본 및 실시설계용역

용역기간 연장 검토보고

가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지)기본 및 실시설계용역에 따른

용역기간 연장건에 대한 검토보고임.

용역개요

❍ 용 역 명 : 가산2빗물펌프장 유수지복개(차고지)기본 및 실시설계용역

❍ 과업위치 : 서울시 금천구 가산2빗물펌프장

❍ 과업범위 : 유수지복개 A=4,300㎡

- 차고지조성 A=3,000㎡ , 체육시설설치 A=1,300㎡

❍ 용역기간 : 2014. 12. 29 ∼ 2016. 10. 31

❍ 용 역 사 : ㈜이산

❍ 용 역 비 : 207백만원

추진경위

❍  2014.12.29   기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2015.07.17   기본 및 실시설계에 따른 실무자 회의개최(1차)

❍ 2015.08.18   기본 및 실시설계에 따른 실무자 회의개최(2차)

❍ 2015.11.02   남부도로사업소 청사 및 차고지 이전시기 검토회의 개최

❍ 2015.11.12   기본 및 실시설계에 따른 실무자 회의개최(3차)

❍ 2015.12.24   설계경제성 검토 및 심사통보

❍ 2016.06.08   용역설명회(금천구청)

❍ 2016.06.15   자문회의 실시

❍ 2016.10.12   건설기술자문회의

보고내용

❍ 남부도로사업소 이전에 따라 도로사업소청사는 시흥동으로, 차고지는 가산2

빗물펌프장으로 이전하고

❍ 가산2빗물펌프장 유수지를 복개 후 일부는 남부도로사업소 차고지로 사용하고

일부는 체육시설로 사용토록 당초 계획하였으나,

❍ 장비보관소 이전을 위한 대체 부지(강남순환로 선암교 하부 공간)에 대한 추가 검토요구에 따른 도로관리과로부터 용역기간 연장을 요청받은 상태임

(도로관리과-17308호,2016.10.26.)

- 강남순환로 선암교 하부 공간

․ 위 치 : 서초구 우면동 448-8외 4필지

․ 부지 사용현황 : 강남순환로 유지관리를 위하여 사업시행자는 영업소 하부공간에 관리사무소와 자재창고 등으로 활용중임

조치의견

❍ 설계 추가검토 등을 완료하기 위해서는 용역기간이 절대적으로 부족한 실정으로 이에 따라 아래와 같이 용역기간을 연장하고자 함.

- 당초 : 2014.12.29.~2016.10.31

- 변경 : 2014.12.29.~2016.12.31.  끝.