문서번호	교량안전과-19595
결재일자	2016.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	교량관리팀장	교량안전과장		안전총괄관
백운경	유제천	박문희		10/28 이택근
협 조

한강교량 보수·보강공사 건설사업관리용역 발주계획

2016. 10

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「한강교량 보수․보강공사 건설사업관리용역」발주 계획

한강교량 보수․보강공사의 효율적인 공정관리와 품질향상 및 안전관리를 위한 “한강교량 보수․보강공사 건설사업관리용역” 발주계획에 대한 보고임

Ⅰ		관련근거 및 사업개요

관련근거

○ 한강교량 및 1종 일반교량 보수공사 건설사업관리용역 개선보고

: 교량안전과-13466(2016.7.25)

○ 시민생활과 직결되는 시설물유지관리공사(연간단가계약) 12월 중 발주 및 계약

:기술심사담당관-19800(2015.11.24)

건설사업관리용역 대상 공사

○ 위    치 : 한강상 20개 교량(암사 ~ 행주대교)

○ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2017.12.31

○ 주요공종

- 교면포장 보수,교면방수,신축이음장치 보수,균열보수,단면보수,

우물통 보수․보강, 강재도장 보수, 잡철물제작 설치,기타 유지관리 등

○ 공 사 비 : 27,629백만원 상당 ( 2017년도 )

○ 2017년도 세부공사 내역 (예산 편성안 기준)

연번	사 업 명	사업비(천원)	비고
계		27,629,070
1	한강교량 일상유지보수	6,900,000
2	동호대교 보수공사	1,114,000
3	동작대교 보수공사	5,772,000
4	한남대교 보수공사	1,220,000

연번	사 업 명	사업비(천원)	비고
5	한강대교 보수공사	662,000
6	성수대교 보수공사	942,000
7	한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사	700,000	(한강,한남)
8	한강대교 외 2개소 우물통 보수보강공사	4,084,070	(한강,성수,성산)
9	한강상 PSC교량 안전강화	6,235,000	(원효,동작,서강)

Ⅱ		건설사업관리용역발주 계획

용 역 명 : 한강교량 보수․보강공사 건설사업관리용역

용역기간 : 2017. 1. ~ 2019.12.31.(36개월)

용역개요 : 공사전반에 관한 감독권한대행 등 건설사업관리

(관급자재, 건설폐기물처리포함)

용 역 비

(단위:천원)

총역비	투자계획			비고
	2017년	2018년	2019년
3,005,860	1,000,000	1,000,000	1,005,860

Ⅲ		계약방법 및 감리단 투입계획

계약체결 방법 : 단독 또는 공동도급, 장기계속계약

❍ 공동수급대표자를 포함하여 최소지분율 5%이상의 3개 업체 이내로

공동이행방식으로 참여가 가능함.

❍ 본 용역은 3개사까지 공동도급이 가능하며 입찰참가 신청 시 공동수급 표준협정서를 제출하여야 함

❍  지역업체 참여도 점수부여(지역업체 참여비율 20%이상)

낙찰자 결정방법 : 기술자평가서(SOQ)에 의한 적격심사

❍  입찰참가자 중 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정

- 종합평점 산정 : 사업수행능력(65점)+지역업체 참여도(3점)+경영상태(2점)+

입찰가격(30점) + 기술인력보유(-10점) + 계약질서준수(-1점)

감리단 투입계획

구 분		투입인원	분야별	근무기간	근무내용	비고
상주	책임기술자	1인	토목1	36개월	현장상근
	분야별기술자	5인	토목5	27~18개월	현장상근
	분야별기술자	1인	안전1	27개월	현장상근
비상주	기술지원기술자	3인	토목2,안전1	22개월	본사근무

Ⅳ		추진사항 및 향후계획

○ 기술용역타당성 심사완료 : 2016.  9.  9

○ 계약심의위원회 심의완료 : 2016. 10. 25

○ 사업수행능력 평가 및 평가서 작성기준 심의완료 : 2016. 10. 20

○ 일상감사 의뢰 예정 : 2016. 10. 31

○ 용 역 발 주   : 2016. 11. 10.

○ 사업수행능력 평가 및 기술자 평가 : 2016. 11. 20 ~ 12.20

○ 계약 및 착수  : 2016. 01.

붙임 : 1) 건설사업관리용역 과업내용서 1부.

2) 사업수행능력 펼가 및 평가서 작성기준 1부.

3) 건설사업관리용역 산출내역서 1부. 끝.