문서번호	산지방재과-12334
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		정상모	11/10 代김상국
협조

’16년 산사태 예방사업 추가지역 합동점검 계획

2016. 11.

푸른도시국

(산지방재과)

’16년 산사태 예방사업 추가지역 합동점검 계획

민원사항 해결요청 등으로 추가 시행 중인 산사태 예방사업에 대해 외부전문가와 합동점검 및 현장자문을 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

❍ 점검대상 : 7개소

구 분	공사위치	공사개요	공사기간	총공사비	비 고
종로구	부암동 65-3	깬돌기슭막이 131㎡ 낙석방지책 30경간	’16.11.8 ~12.7	88백만원	낙석우려 민원
	부암동 산2-1	큰돌보막이 1개소 큰돌기슭막이 122.4㎡	’16.11.8 ~12.7	132백만원	낙석우려 민원
성북구	정릉동 산87-1	석축쌓기 · 높이 1.5~2m, 면적 33㎡	’16.10.7 ~11.13	22백만원	기슭막이 보수 요청 (여래사 주변)
	정릉동 산87-1	낙석방지망 · 가로 3.5m, 세로 2.5m - 돌망태 : 높이1m, 길이23m	’16.11.18 ~12.10	20백만원	낙석우려 민원 (운선암 뒤)
관악구	미성동 1566-34	낙석방지책 55경간 벤치플륨관 58m	’16.10.20 ~11.8	85백만원	낙석우려 민원
	난곡동 산125-4	낙석방지망 1,360㎡	’16.10.28 ~11.7	98백만원	낙석우려 민원
강동구	상일동 152-4	돌수로 70m, 차수벽 44m 목재울타리 82	’16.7.28 ~10.15	150백만원	배수불량 민원

❍ 점검일시 : ’16.11.17(목)  09:00 ~ 18:00

❍ 점 검 자

-***********: **************

- 외부전문가(2명) : 서울연구원 이석민 박사, 강림기술사 사무소 대표 이동균

※ 점검대상 자치구는 현장점검 4일전까지 외부전문가에게 설계도서를 제출

❍ 점검내용

-*민원해결을 위한 적정공법 반영 여부

-*사방시설물 시공의 적정성 및 금년내 공사완료 가능 여부

- 공사현장 안전관리 및 예산집행 적정 여부

Ⅱ		조치계획

❍ 경미한 지적사항은 현장 시정 조치

❍ 시일이 소요되는 지적사항은 공사완료 전까지 조치 및 결과 보고

Ⅲ		외부전문가 자문비 지급

❍ 자문비 지급 내역

○ 산출근거 : 2명 × 1일 × 200,000원 = 400,000원

□ 설계서 검토비 :   50,000원

□ 현장실사비    : 150,000원

○ 지급방법 : 외부전문가 개별계좌 입금

□ 2016년 예산범위내에서 지급

□ 예산과목 : 산지방재과, 산림안전관리, 산림방재 전문가육성, 산지방재요원 전문역량 강화, 사무관리비

붙임 : 자문의견서(양식).  끝.