투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	공사기간 연장 의뢰(서울숲공원 제비서식처 조성공사)

서울숲공원에서 시행중인 『서울숲공원 제비서식처 조성공사』와 관련 아래와 같이 준공기간을 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울숲공원 제비서식처 조성공사

나. 도 급 액 : 금33,680,000원(금삼천삼백육십팔만원)

다. 공사기간 : 2016. 10. 28 ~ 2016. 11. 16

라. 도 급 자 : (주)청신종합조경 대표 손 신 자

마. 공사기간 연기

- 당초 : 2016. 10. 28 ~ 2016. 11. 16

- 변경 : 2016. 10. 28 ~ 2016. 11. 30

바. 연기사유 귀책소재 : 발주처

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 연기사유 : 별첨 연기사유 참고

따로붙임 : 1. 공사기간 연기 의뢰서 1부.

2. 공사기간 연장 시행 보고서 1부.  끝.

	서울숲공원관리사무소장
주무관	박선재		시설팀장	김완수		서울숲공원관리사무소장	11/10 윤학수
협조자
시행	서울숲공원관리사무소-5984	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273	/
전화	02-460-2921	/전송	02-460-2930	/		/	대시민공개