문서번호	청소행정과-25162
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		청소작업팀장		청소행정과장		주민생활국장
조대환		김용섭		황규영		11/14 소판수
협조
	재무과장		代유종식
	계약팀장		김종수

★ ◉

2016년도 폐목재 처리 위탁용역

설계변경 계획

청소행정과

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 □
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 □
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 □
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 □
		●	민간단체	:		유 □( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2016년도 폐목재 처리 위탁용역 설계변경 계획

2016년도 폐목재 처리 위탁용역에 대하여 아래와 같이 계약 설계변경을

시행코자 합니다.

계약개요

계약건명: 2016년도 폐목재 처리 위탁용역

계약업체: (주)천일에너지(대표자 박상원)

계약기간: 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31.

계약금액: 금19,600,000원

예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리,

민간이전, 민간위탁금

설계변경 내역

위탁물량 변경

구 분	변경전	변경후	비 고
위탁물량(예상)	2,500톤	3,000톤	500톤 증가
톤당 단가	7,840원	7,840원	변경없음

계약금액 변경

(단위: 원)

구 분		당초금액	변경금액	증액금액
도급 금액	계약금액	19,600,000	23,520,000	3,920,000
	부가세	면세	면세
	계	19,600,000	23,520,000	3,920,000

예산 가용현황(16.11.11기준)

(단위: 원)

폐기물처리 민간위탁금 예산 잔액	금회 설계변경 금액	설계변경 후 잔액	비 고
35,018,760	3,920,000	31,098,760

설계변경 사유

당초 처리예상 물량보다 폐기물 처리량 증가

- (주)천일에너지는 폐기물 종합 재활용 업체로 우리구에서 발생하는

폐목재를 처리하여 왔으나, 공동 및 단독주택 신규 입주에 따른    폐기물 처리 물량이 증가함에 따라 조기 준공이 예상되어 설계

변경을 하여 원활히 폐기물 처리를 하고자 함.

※ 【계약 과업내역서: 운송 및 처리조건】

연간 단가계약의 처리물량은 예정량이며, 처리물량이 예정량 보다 적을          경우에는 입고 총량으로, 처리물량 초과시에는 쌍방의 합의 하에 처리한다.

행정사항

설계변경  ----- 재무과

붙임   산출내역서 1부.  끝.