문서번호	건축부-16007
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김찬유		유현수	11/18 김진용
협 조
	주무관			김승조

『재사용플라자 건립공사』

건설폐기물처리용역 총차 및 2차 공기연장 검토 보고

2016. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『재사용플라자 건립공사』

건설폐기물처리용역 총차 및 2차 공기연장 검토 보고

『재사용플라자 건립공사』와 관련하여 건설폐기물처리용역 총차 및 2차에 대한 공기연장이 필요하여 검토 보고함

1		용역개요

용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설폐기물처리용역

위    치 : 성동구 용답동 205-1번지외 5필지 일대

규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,529㎡

용    도 : 폐기물처리시설(재활용시설)

용역기간 : (총차) 2015.  2. 24 ~ 2016.11. 30

(2차) 2015. 11.   1 ~ 2016.11. 30

용 역 비 : (총차) 1,160.478,000원

(2차)    182,228,000원

용 역 사 : ㈜백산이엔티건설, ㈜한진건설

건설사업관리용역사 : 펨코엔지니어링, 아이티엠코퍼레이션

현공정률 : 67%

2		용역기간 연장 검토

관련근거 : PC재사용-526호(2016.11.16)호

총차 공사기간 조정 : 증) 105일

- 사 유 : 재사용플라자 건립공사 공사기간 연장에 따른 용역기간 연장 필요

조정내용

구 분	용 역 기 간			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
총차	‛15.02.24~‛16.11.30	‛15.02.24~‛17.03.15	증) 105일	계약금액변경없음
2차	‘15.11.01~’16.11.30	‘15.11.01~’17.03.15	증) 105일

연기귀책 사유 : 도시기반시설본부

지체상금 부과 : 미부과

3		감리자 검토의견

재사용플라자 건립공사 공기연장에 따른 용역기간 변경은 적정하다고 판단됨

4		처리의견

건축공사 연장에 따른 용역기간 변경으로, 상기와 같이 총차 및 2차용역 기간에 대한 변경계약을 추진코자 함

5		향후 추진계획

2017. 11월 : 용역기간 연장계약

2017.  3월 : 용역준공

붙 임  폐기물처리용역 총차 및 2차 용역기간 연장요청서 1부.  끝.