문서번호	도로보수과-6598
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
홍민표		김준섭	11/21 이덕기
협조

불량맨홀 정비 완료보고(2,3차)

(‘16년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

남부도로사업소

(도로보수과)

불량맨홀 정비 완료보고(2,3차)

현재 시행중인『‘16년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』관련 2,3차 작업지시 완료건 대한 그 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 도로보수과-4663호(2016.8.23.), 5455호(2016.9.29.) : 2,3차 작업지시

○ 우암16-09191호(2016.8.22.), 11111호(2016.11.10.) : 2,3차 완료보고 제출의 건

□ 공사개요(2,3차)

○ 공 사 명 : ‘16년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 도 급 자  : ㈜우암건설 대표 고원준

○ 작업지시 내역 : 불량맨홀 정비 159개소(2차 26개소, 3차 133개소)

○ 작업기간 : 2016. 8.24. ~ 11.11.(2차 8.24~9.20, 3차 10.01~11.11)

□ 보고내용

○ 정비완료 현황                                          (단위 : 개소)

구 분	소 계	정비시행	정비제외	완료누계 (1차~3차)
수 량	159	146	13	394

○ 2,3차 정비대상(159개소)중 자재수급 어려움 등 맨홀관리기관의 내부사정으로      13개소 정비제외하고 146개소에 대하여 정비시행 완료.

○ 현재까지 2016년 관내 포장도로 불량맨홀 정비실적은 3차례(’16.6.13~11.10까지)    에 걸쳐 394개소 정비 완료함.

□ 행정사항

○ 맨홀관리기관 자재공급 불가 등으로 인해 불량맨홀 정비 제외 대상 맨홀에 대하여     맨홀관리기관이 자체적으로 특별 관리할수 있도로 맨홀관리기관에 통보코자함.

붙 임 : 2,3차 작업완료 현황 각1부.  끝..