등록번호

푸른도시과-21469

주무관

공원기획팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

등록일자

2016.11.22.

구만회

송행국

양종수

전결 11/23

이경우

결재일자

2016.11.23.

공개구분

대시민공개

협  조

정책기획담당관

임근래

예산팀장

김정현

『백련산 유아숲체험장 조성공사』

실정사항 검토보고 및 낙찰차액 사용계획

서 대 문 구

푸른도시과

『백련산 유아숲체험장 조성공사』

실정사항 검토보고 및 낙찰차액 사용계획

『백련산 유아숲체험장 조성공사』와 관련, 현장여건에 따라 물량변경이 불가피하여 낙찰차액을 사용, 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

1		공 사 개 요

▢  공 사 명 : 백련산 유아숲체험장 조성공사

▢  위    치 : 홍은2동 산19-19번지 백련근린공원 일대

▢  공사기간 : 2016. 8. 1. ∼ 11. 28.

▢  공사내용 : 숲속 내 어린이 체험공간 및 시설 조성 등

▢  도 급 비 : 140,691,000원

▢  도 급 자 : ㈜에스지씨앤디 대표 김명순

2		낙찰차액 사용계획

▢ 주요변경사항 및 검토내용

(단위: 원)

구 분	현황 및 문제점	조치계획	소요예산
철거공사	○ 진입로 주변 미관불량한 능형망 휀스 추가 철거 필요	○ 능형망휀스 철거 - 능형망휀스 철거 : 18경간 → 33경간	도급 증)87,345
	○ 인근 공원 내 화장실 설치예정으로 노후된 좌변식 화장실 철거 필요	○ 화장실 철거 1동 - 간이화장실 철거 : 0동 → 1동	도급 증)964,154
	○ 체험놀이공간 중 최상단은 급경사지로 사면절취량이 많고 효용성이 부족함	○ 최상단 체험놀이공간 설치제외 - 관목벌목 및 제근 : 1,235㎡ → 1,207㎡	도급 감)16,352
식재공사	○ 네트오르기 사면, 산책로, 대피소 주변 등 수목식재 물량 추가 필요	○ 수목식재 물량 변경 - 조팝나무(H0.6*0.3) : 200주 → 700주 - 황매화(H1.0*0.4) : 80주 → 870주 - 전나무(H2.0*W1.0) : 0주 → 12주	도급 증)8,766,842

구 분	현황 및 문제점	조치계획	소요예산
시설물공	○ 입구가 계획된 게이트보다 협소하여 게이트 규모 조정필요	○ 입구게이트 규모 축소 - 입구게이트(5*2*4.5) : 1개소 → 0개소 - 입구게이트-1(5*2*4.0) : 0개소 → 1개소	도급 감)156,831
	○ 방향안내판 등 현황에 맞게 안내판 설치 필요	○ 안내판 설치 수량 조정 - 방항안내판 : 3EA → 2EA - 테마안내판 : 6EA → 5EA - 입구안내판 : 0EA → 1EA	도급 감)88,800 관급 감) 1,684,200
	○ 화장실 철거로 기존 화장실 철거지로 대피소 위치를 조정하는 것이 합리적임	○ 화장실 위치 이동 - 당초 : 감성놀이공간 내 - 변경 : 화장실 철거지	-
	○ 현장 유용목 및 유용석이 부족하여, 사면마감 공법 조정필요	○ 사면마감 공법 조정 - 사면마감(H1000, 유용목) : 88.8m → 4m - 사면마감A-1(낙엽송 L2000) : 0m → 13m - 사면마감A-1(낙엽송 L3000) : 0m → 18m - 사면마감B(H1000, 유용석) : 54.8m → 0m - 식생매트(340*500) : 0㎡ → 81.6㎡	도급 감)8,960,170 관급 증)2,880,000
	○ 체험놀이공간 축소 등 그루터기의자 수량 조정 필요	○ 그루터기의자 수량 조정 - 그루터기의자 : 109EA → 75EA	도급 감)1,928,616
	○ 현황상 사면부 안전난간 추가 설치 필요	○ 안전난간 수량 변경 - 안전난간(H1200, 표준부) : 13경간 → 0경간 - 안전난간(H1200, 단부) : 1경간 → 0경간 - 로프난간(H1200, 표준부) : 72경간 → 0경간 - 로프난간(H1200, 단부) : 9경간 → 0경간 - 로프난간(H1150, 표준부) : 0경간 → 85경간 - 로프난간(H1150, 단부) : 0경간 → 10경간	도급 감)857,391
	○ 현황에 맞게 놀이기구 규격 등 조정필요 - 매바위오르기 밧줄 규격 조정 필요 - 유아숲체험장 내 솔방울던지기 적지 부족 - 네트오르기 기능 유지 및 안전사고 예방을 위한 규격 조정 필요 - 가방걸이대 규격 및 수량 조정 필요 - 체험놀이공간 규모가 협소하여 인디언집 설치 수량 및 규모 변경 - 사면 내 밧줄놀이기구 설치시 안전사고 위험이 있음	○ 놀이기구 규격 및 수량 조정 - 매바위오르기(3.6*9.5) : 1EA → 0EA - 매바위오르기(3.0*5.5) : 0EA → 1EA - 솔방울던지기(545*540*1230) : 4EA →1EA - 네트오르기(W6500*L12000) : 1EA →0EA - 네트오르기A(W6500*L12000) : 0EA →1EA - 가방걸이대(1.5*0.4*0.8) : 1EA → 0EA - 가방걸이대-1(1.5*0.4*0.8) : 0EA → 2EA - 가방걸이대-2(2.1*0.4*0.8) : 0EA → 1EA - 인디언집(2000*2000*H1500) : 2EA → 0EA - 인디언집(2500*2500*H3000) : 0EA → 1EA - 흔들밧줄건너기 A,B,C : 1EA → 0EA - 흔들밧줄건너기 A-1 : 0EA → 1EA - 흔들밧줄건너기 B-1 : 0EA → 1EA - 나무그네 : 0EA → 1EA	도급 감)3,272,584

구 분	현황 및 문제점	조치계획	소요예산
시설물공	○ 현황에 맞게 산책로 목계단 추가설치 필요	○ 목계단 설치 물량 변경 - 계단(W350*L1000) : 20EA → 33EA - 계단(L1500*2EA) : 0EA → 19EA - 계단(L1500*2EA) : 0EA → 14EA	도급 증) 7,579,542
	○ 상시 물이 말라있으므로 웅덩이는 설치 효과가 낮을 것으로 판단됨	○ 웅덩이 설치제외 - 웅덩이(23.4m, H1000) : 1개소 → 0개소	도급 감)34,634
포장공	○ 과도한 바크 포장시 유지관리 및 미관 저해의 요소가 있음	○ 일부 바크포장을 마사토포장으로 변경 - 우드칩포장(T50) : 769.4㎡ → 260㎡ - 마사토포장(T100) : 0㎡ → 296㎡ - 모래포장(T200) : 0㎡ → 84㎡ - 흙다짐 : 150.87㎡ → 0㎡	도급 감)3,463,959
	○ 현장 유용목 부족으로 목재경계 재질 변경 필요	○ 납엽송원목으로 목재경계 시공 - 목재경계(D120,자연목) : 471.38m → 30m - 목재경계(D120,낙엽송) : 0m → 300m	도급 증)2,094,611
	○ 현황에 맞게 산책로 포장(야자매트 깔기) 물량 조정 필요	○ 야자매트 깔기 추가 - 야자매트(T20) : 119.18㎡ → 202㎡	도급 증)198,521 관급 증)3,022,930
우배수공	○ 자연배수가 가능한 구간 맹암거 등 설치 불필요	○ 맹암거, 배수관 수량변경 - 맹암거(간선) : 87.44m → 24m - 맹암거(지선) : 105.3m → 48m - 엘보(45°) : 0EA → 4EA - 배수관(PVC) : 57.4m → 34m - 빗물받이 : 8개소 → 2개소	도급 감)3,849,858
	○ 잔디수로 설치구간 상부는 산복도로 배수로와 연결되고, 기존 계간수로가 훼손된 점으로 보아, 우수량이 상당할 것으로 예상되어, 잔디수로로는 우배수 기능을 수용하기 어려울 것으로 보임	○ 잔디수로 설치구간 계간수로로 변경하고, 시공물량 조정 - 잔디수로 : 16.21m → 0m - 계간수로 : 0m → 25m	도급 증)4,325,156
	○ 백련약수터~산복도로간 배수로에 별도의 배수시설이 부재하여 집중호우시 시설물 훼손이 우려됨	○ 현장석 활용하여 호형수로 설치 - 돌수로(W1200) : 0m → 46m	도급 증)1,208,972
토공사	○ 체험놀이공간 축소에 따른 면고르기 물량 정산 필요	○ 면고르기 물량 정산 - 면고르기 : 913.56㎡ → 885.56㎡	도급 감)14,252
폐기물처리비	○ 화장실 철거에 따른 물량 증가	○ 화장실 철거물량 변경 - 폐콘크리트 처리 : 0.55톤 → 1.47톤 - 혼합폐기물 처리 : 0톤 → 14.4톤 - 폐기물 운반 : 0㎥ → 12.64㎥	도급 증)853,602

▢ 공사비 변경사항

(단위: 원)

구분		당 초	변 경	증·감	비 고
계		170,086,000	175,000,220	4,914,220
도급비	공급가액	127,900,909	128,838,181	937,272
	부가가치세	12,790,091	12,883,819	93,728
	계	140,691,000	141,722,000	1,031,000
관급자재비		26,495,000	33,278,220	6,783,220
이 전 비		2,900,000	0	-2,900,000

▢ 예산 집행계획(시설비)

(단위: 천원)

예산현액	재배정액	기원인행위액	집행잔액 (낙찰차액 포함)	예산집행액
200,000	199,685	175,900	23,785	4,914

▢ 예산과목 : 생활권공원 확충, 미집행공원 조성, 백련근린공원(서대문) 조성, 시설비 및 부대비, 시설비[시 재배정]

4		행정사항

▢ 위와 같이 공사시행 중 현장여건을 감안, 추가 소요예산(4,914천원)은 낙찰차액 등 집행잔액을 사용하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증표 1부.  끝.