문서번호	토목부-24804
결재일자	2016.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		이동훈	12/01 김영수
협조
	주무관		오열상

폐기물처리용역 설계변경(6차1회) 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 건설폐기물처리용역 》

2016. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

폐기물처리용역 설계변경(6차1회) 검토보고

(월드컵대교 건설공사 건설폐기물처리용역)

공사 시행에 따른 건설폐기물처리용역(6차) 물량 정산으로 인한 설계변경 검토 보고임.

※ 관련근거 : ㈜포스코엔지니어링 인프라토목-16-03278호(2016.12.01.)

용역개요

❍ 용역규모 : 총괄 폐콘코리트 12,900ton, 폐아스콘 6,150ton

(6차 폐콘크리트 3,458ton, 폐아스콘 1,967ton)

❍ 용역기간 : 총괄 2011. 9.22. ~ 2020. 8.31.

(6차 2016. 2. 1. ~ 2016.12.31.)

❍ 용 역 비 : 총괄 350,829,000원 (6차 100,000,000원)

❍ 용 역 사 : 문화경기㈜ 외 1개사

설계변경 내용 (총괄 변경없음)

❍ 설계변경 사유 : 북단IC 공사중 발생한 건설폐기물을 실물량으로 정산하여 설계변경 시 반영코자 함.

❍ 폐기물 수량 변경내용(용역기간 및 용역비 변경없음)                 (단위:톤)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
6차1회	폐콘크리트	3,458	5,033	증) 1,575
	폐아스콘	1,967	484	감) 1,483

조치계획

❍ 위 보고내용과 같이 변경된 폐기물 물량을 금회 설계변경 시 반영하여 폐기물처리업무 수행에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(6차1회) 1부.  끝.