문서번호	설비부-19011
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	12/06 권오식
협 조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사 -

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

설비부

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사 -

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사』에 소요되는 관급자재가 설치 시기 미도래로 다음과 같이 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사

□ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

□ 공사기간 : 총차 2016.07.11.~2019.12.31.

1차 2016.07.11.~2016.12.31.

□ 도 급 비 : 총차 2016.07.11.~2019.12.31.

1차 2016.07.11.~2016.12.31.

□ 계 약 자 : ㈜영진전력 대표 정진우

□ 감 리 자 : ㈜이산외 2개사

2		관급자재 계약현황

□ 품목별 계약내용

○ 계약건명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사 철제가로등주 외 7종 구매

계약번호	품명	계약자	계약금액(원)	납품기한
00158001601	접속단자대	㈜두리계전	1,651,100	‘16.12.31
00148174101	분전반	㈜두리계전	6,897,000	‘16.12.31
12162105800	조명제어장치	웰스씨앤티(주)	3,180,000	‘16.12.31
00168070000	철제가로등주	㈜명도산업조명	25,310,000	‘16.12.31

□ 납품기한 연기내용

○ 납품기한 연기근거

- 전기공사 관급자재 납품연기 합의서 제출(올대감16-102호, `16.12.06)

○ 납품기한 연기사유

- 선행 공정(토목) 공사기간 연기에 따른 전기공사에 소요되는 관급자재 설치 시기 미도래로 당초 납품기한 연기가 필요한 실정임.

○ 납품기한 연기 세부 내용

계약명	계약번호	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당초	변경
올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사 철제가로등주 외 7종 구매	00158001601	㈜두리계전	1,651,100	‘16.12.31	‘17.12.31
	00148174104	㈜두리계전	6,897,000	‘16.12.31	‘17.12.31
	12162105800	웰스씨앤티(주)	3,180,000	‘16.12.31	‘17.12.31
	00168070000	㈜명도산업조명	25,310,000	‘16.12.31	‘17.12.31

○ 귀책 소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

3		조 치 계 획

□ 당초 조달 구매 요청한 전기공사의 관급자재 납품기한을 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 합의서(납품기한연기) 각1부. 끝.