투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰 요청[올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사]

1. 올대감 16-101호(2016.12.06) 및 설비부-19012호(2016.12.06)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사」에 대하여 준공기한(전체 및 1차) 연기의뢰 요청을 하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기공사

- 공사기간 : 총차 ′16.07.11. ~ ′19.12.31.(1차 ′16.07.11. ~ ′16.12.31.)

- 도 급 비 : 전체 금1,068,785,370원(1차 금245,410,000원)

- 계 약 자 : ㈜영진전력 대표 정진우

나. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총차	2016.07.11.~2019.12.31.	2016.07.11.~2020.03.25.	(증85일) 계약금액 변경없음
1차	2016.07.11.~2016.12.31.	2016.07.11.~2017.12.31.	(증365일) 계약금액 변경없음

다. 준공기한 연기사유

- 본 전기공사의 선행 공정인 토목공사가 공사기간(총차 및 1차분)을 연장조치함에 따라 당초 공사기간으로는 절대공기가 부족하여 연기 조치 필요.

라. 귀책소재 : 발주처

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 공사기간 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김두환		열빛총괄과장	代이종근		설비부장	12/07 권오식
협조자	계약1팀장	조현
시행	설비부-19051	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	부분공개(5)