문서번호	설비부-19167
결재일자	2016.12.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	12/08 권오식
협조

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』

준공기한 및 감리용역기간 연장 검토 보고

2016.  12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』

준공기한 및 감리용역기간 연장 검토 보고

「서울역 주변 교차로 개선 전기공사」관련, 감리회사로 부터 준공기한 및 감리 용역기간 연장 요청에 따른 검토 보고임.

관련근거

□ TR-감-1202(‘16.12.07): 서울역주변 교차로 개선 전기공사 준공기한 연기

사업개요

□ 위   치 : 중구 순화동 287-7 염천교사거리 외 4개소

□  규  모

- 서울역 교차로 차량신호등 10개소 신설, 무인단속카메라 2대 신설

- 서부역 교차로 교통신호기 11개소 신설, 퇴계로 중앙보행로 신호기

- 중림동삼거리 차량신호등 1조 신설, 가로등 4본 이설

- 숙대입구 차량신호등 1조 신설, 가로등 4본 철거(반납)

- 공사기간 : 2015.10.02.~ 2016.12.31

- 도 급 비 : 774,906천원

- 시 공 사 :***************

- 감 리 사 :*************

보고 내용

□ 준공기간 변경내용

구 분	계약자	공사․용역기간		계약금액 (변경없음)	비 고 (연 기)
		당 초	변 경
전기공사	********	2015.10.02 ~ 2016.12.31	2015.10.02 ~ 2017.04.30	774백만원	120일
감리용역	*****	2015.10.02 ~ 2016.12.31	2015.10.02 ~ 2017.04.30	26백만원	120일

□ 연기사유

- 선행 토목공사 진행에 따른 전기공사 시기 미도래로 준공기한 및 감리 용역기간 연장

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

조치의견

□ 서부역 교차로 및 퇴계로 선행 토목공사 지연으로 후속 공종인 전기공사를 추진할 수 없어 준공기한 및 감리용역기간을 연장하여 공정관리에 만전을 기 하고자 함.

□ 서울시 재무과 및 건설총괄부에 준공기한 연기 의뢰 하고자 함.

붙임 : 1. 관련문서 1부.

2. 합의서 2부.  끝.