행복한 변화, 사람 사는 동작
		동작구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(노량진1동 330일대 사각형거 보수보강공사)

1. 우리 구에서 시행중인 『노량진1동 330일대 사각형거 보수 보강 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 노량진1동 330일대 사각형거 보수 보강 공사

나. 공사기간 : 2016.7.18 ~ 2016.12.31.

다. 도 급 자 : 동현종합건설(주)  대표 김 춘 식

라. 예산과목

- 물순환안전국 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로보수보강, 시설비【401-01, 시비(100,000,000원)】

- 물순환안전국 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로신설개량, 하수시설물 긴급복구 및 정비, 시설비【2016-401-01, 시비(90,000,000원)】

마. 변경내역                                                   (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감(-)	비 고
총 공 사 비		88,685,300	172,300,000	증) 83,614,700
도급비	공급가액	75,623,000	154,772,728	증) 79,149,728
	부가가치세	7,562,300	15,477,272	증) 7,914,972
	계	83,185,300	170,250,000	증) 87,064,700
폐기물처리비		5,500,000	2,050,000	감) 3,450,000

※ 변경내역 : 표면보호공 : 11.9㎡→0㎡

단면보수(PMI) : 143.75㎡→513.1㎡

첨부 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증서 1부.

4. 긴급복구비 사용계획 보고서 1부.  끝.

주무관	이경욱		치수팀장	송병석		안전치수과장	황왕연		안전건설교통국장	12/13 이학구
협조자	계약팀장	이홍열		재무과장	김병인		기획재정국장	유제환
시행	안전치수과-19289	(		)	접수		(		)
우	06928	서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동)	/	www.dongjak.go.kr
전화	02-820-9935	/전송	02-820-1453	/		/	부분공개