문서번호		지역경제과-58043		★주무관		시장지원팀장		지역경제과장		기획재정국장
결재일자		2016.12.14.
				배태수		김순오		정길용		12/14 이상형
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	-2016년 수유전통시장 시설현대화- 아케이드내 보수·보강사업 실정보고
2016.12.14.
강 북 구

2016 수유전통시장 시설현대화

아케이드내 보수·보강사업 실정 보고

‘2016년 수유전통시장 시설현대화 아케이드내 보수보강사업’ 추진중 수유전통시장 마감자재 물량변동등에 대한 실정보고건이 있어 아래와 같이 검토하고 처리하고자 합니다.

2016.12.

보고자 지방행정주사보 배태수

공사개요

○ 공 사 명: 2016년 수유전통시장 아케이드 내 보수·보강 공사

○ 위    치: 서울시 강북구 도봉로67길 일대(수유동) 수유전통시장

○ 공사기간: 2016.12.5.∼12.24.

○ 공사내용

- 화강석 붙임, 바닥몰탈작업, 바닥미장, 물받이 실리콘보강, 기둥감싸기 등

○ 도 급 비: 금8,913천원(변경전 8,913천원, 변경후 9,450천원)

○ 시 공 자: ㈜성신에이엘에스

검토사항 및 변경사유

구 분	검토사항	변경내용		변경사유
		당초	변경
보강공사	물받이 실리콘보강	40m	132m	아케이드와 건물사이 실리콘 마감들이 들뜸으로 오래된 실리콘 제거후 실리콘 마감이 요구됨

공사비 검토

공종		금 액 (원)			비고
		당 초	변 경	증 감
보강공사	화강석붙임	1,751,038	1,751,038	-	-
	바닥몰탈작업	108,211	108,211	-	-
	바닥철거	32,598	32,598	-	-
	바닥미장	150,672	150,672	-	-
	물받이청소	1,846,192	1,846,192	-	-
	폐기물처리비	1,265,000	1,265,000	-
	물받이실리콘보강	159,334	525,802	366,468	증
	기존교차로물받이설치	333,752	333,752	-	-
	기둥감싸기	674,769	674,769	-	-

검토 및 처리의견

- ‘2016 수유전통시장 시설현대화 아케이드 내 보수·보강 공사’의 원활한 추진을 위하여 현장여건 및 민원사항을 반영하여 추가공사 추진코자 함.

붙   임  1. 수유전통시장 아케이드내 보수보강 사업 추가공사요청 공문 1부.

2. 설계변경내역서 및 보수공사 도면 등 각 1부.  끝.