문서번호	도로보수과-6433
결재일자	2016.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종		이상호	12/19 이종엽
협조

2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시 보수공사(성동) 설계변경(2회,정산) 검토 보고

2016. 12.

성동도로사업소

(도로보수과)

2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시 보수공사(성동)

설계변경(2차,정산) 검토 보고

하반기 노후포장도로 정비계획에 의거 포장구간에 대한 노면표시 복구를 완료하고 실 시공 수량으로 정산처리하고자 함.

▢ 관련근거

○ 2016년 노후포장도로 정비공사 추가 재배정액(집행잔액 포함) 사용        및 하반기 공사계획 : 도로보수과-4916(2016.10.11)호

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 정비공사내 노면표시 보수공사(성동)

○ 규    모 : 차선도색 183,418m, 차로밑그림 183,418m

**********************

******************************

○ 공사기간 : 2016. 6. 28 ~ 2016. 12. 30

○ 공 정 률 : 100%

▢ 보고내용

○ 하반기 노후포장도로 정비계획에 의거 포장구간에 대한 노면표시 복구를 완료하고 실 시공 수량으로 정산 처리코자 함.

▢ 설계변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
차선도색	도색 15㎝	m	183,418	175,005	감8,413
차로밑그림		m	183,418	175,005	감8,413

○ 변경금액

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	***********	***********	************
도급비	***********	***********	************
관급비	***********	***********	************
이전비	*********	*	***********

▢ 조치(향후) 계획

○ 상기와 같이 설계변경(정산) 및 준공처리코자 함.

첨  부 : 1. 감리 기술검토서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증결과 1부.  끝.