투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	건설사업관리자 투입기간 검토 회신(서울역 7017, 조경분야)

1. 토목부-25824(2016.12.14.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중에 있는 『서울역 7017 프로젝트 건설공사』와 관련 조경분야 건설사업관리기술자 투입기간을 검토하고 아래와 같이 회신합니다.

가. 감리원 변경 투입기간 및 사유

분 야	투입기간	사 유	비고
조경	당초 :‘16. 6.15.~’17. 2.16. 변경 :‘16. 6.15.~’17. 6.10.	- 조경분야는 후속공정으로 조경 시설물 설치, 수목식재 등 조경 분야 공정관리가 필요함 (현 조경공정율 10%) 현장관리, 실정보고, 설계변경, 준공검사, 인수인계 등 건설사업관리 업무추진 필요함

끝.

	방재시설부장
주무관	고소영		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	12/20 임춘근
협조자
시행	방재시설부-20251	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 14층 서울시 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8733	/전송	02-3708-8756	/	ksy11033@seoul.go.kr	/	대시민공개