투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구) 변경계약 의뢰

1. 도시철도사업부-11800호(2016.12.20)와 관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구)과 관련하여 준공기한 연장에 따른 용역기간 연장 및 투입계획 변경 등으로 인해 다음과 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구)

나. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 외 3개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	2009.01.09. ~ 2017.01.31	2009.01.09. ~ 2017.09.30	증)8개월
8차	2016.01.16. ~ 2017.01.31	2016.01.16. ~ 2017.09.30	증)8개월

라. 용역금액 조정 내역

(단위 : 원)
구분	당 초	변 경	사 유
총괄 (제25회)	4,705,760,000	5,153,260,000	∘계약금액 : 증)447,500천원 ∘변경사유 - 물가변동 반영 : 증)31,000천원 - 감리배치 조정 : 감)31,000천원 - 기간연장 반영 : 증)447,500천원
8차 (제3회)	741,030,000	1,188,530,000

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철건설사업, 우이-신설 지하경전철건설, 시설비및부대비, 감리비(도시철도건설사업특별회계)

붙  임 : 1. 공사완공예정일 변경에 따른 계약금액 조정 검토보고서 1부

2. 변경내역서(총괄 제25회) 1부

3. 변경내역서(제8차 제3회) 1부

4. 합의각서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정영호		공정관리과장	김형건		도시철도사업부장	12/21 박동룡
협조자	주무관	박노성		계약2팀장	양주춘
시행	도시철도사업부-11849	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7180	/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(5)