문서번호	지역경제과-59679			★주무관		시장지원팀장		지역경제과장		기획재정국장
결재일자	2016.12.23.
				배태수		김순오		정길용		12/23 代조상연
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		- 2016 수유재래시장 - 시설현대화 결과보고
2016.12.23.
강 북 구

- 2016 수유재래시장 -

시설현대화 결과보고

□ 사업목적

○ 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법』 제20조에 따라 2016년 전통시장 시설현대화사업으로 선정된 사업에 대한 사업추진으로 더 편리하고 안전한 시장을 만들어 많은 시민들이 찾게 함으로써 시장활성화에 기여하고자 함

□ 사업근거

○ 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제20조(상업기반시설 현대화사업의 지원) 및 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 운영지침

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2016년 수유재래시장 시설현대화사업 누수보수공사

○ 사업기간: 2016년 4월 ∼ 12월

○ 사업대상: 수유재래시장 1개사업

○ 사업내용

- 아케이드 누수보수(2,036㎡)

○ 사 업 비 : 55,000천원

(시설비, 국비 60%, 시비21%, 구비9%, 민자10%  매칭사업)

□ 추진경위

○ 2016.4.27. : 2016년 전통시장 시설현대화사업 추진위원회 회의 개최

○ 2016.5.9. : 민간자부담 예치 안내 → 확보 100% (2016.5.23.)

○ 2016.6.24.: 2016년 전통시장 시설현대화사업 국고보조금 교부(2차)

○ 2016.7.8. : 2016년 전통시장 시설현대화사업 발주 계획

○ 2016.9.23.: 2016년 누수보수공사 설계용역 완료

○ 2016.10.26.: 2016년 누수보수공사 공개경쟁입찰 낙찰자 계약

○ 2016.12.19. : 2016년 누수보수공사 완료

□ 추진내용

가. 2016년 수유재래시장 누수보수공사 설계용역

○ 계약업체 : 에이톰엔지니어링(대표이사:김동기)

○ 추진사항 : 아케이드 누수보수공사 설계

○ 용역기간 : 2016.8.25.~9.23.

○ 사업비 집행 : 총 3,230,000원

나. 2016년 수유재래시장 누수보수공사

○ 계약업체 : ㈜건우구조엔지니어링(대표이사:한순화)

○ 추진사항 : 시장내 누수보수공사 2,036㎡

○ 공사기간 : 2016.11.14.~12.19.

○ 사업비 집행 : 총 51,566,310원

○ 설치 관련 사진

우수유도배관 공사중	우수유도배관설치 후	우레탄방수 설치완료	지붕철판 설치 완료

□ 사업정산

○ 정산 내역

예산과목	예산액	집행액	집행잔액	집행률
시설비	55,000,000원	54,796,310원	203,690원	99.6%

○ 집행잔액 구성비

집행잔액	국비	시비	구비	민간자부담
총 203,690원	122,220원	43,070원	18,030원	20,370원

○  국비122,220원, 시비 43,070원은 2017년 추경예산으로 반납예정

및 민자부담금20,370원은 상인회 예치통장에 반납예정

끝.