문서번호	도로보수과-563
결재일자	2017.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		이석재	01/17 신응수
협 조
	주무관			최완
	주무관			최병수

2017년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

2017. 1.

북부도로사업소

(도로보수과)

2017년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

2017년 우리사업소 “노후포장도로 정비공사”로 재배정된 예산에 대한 조기집행 계획을 수립·시행하고자 함

□ 관련근거

○ 2017년 노후포장도로 정비 추진계획 통보 : 도로관리과–816(’17.1.11.)

- 예산 재배정 내용

구 분	합 계	노후포장도로정비	긴급복구공사	광화문차도구간정비	맨홀정비공사	맨홀정기점검
재배정액	10,536	6,793	1,843	1,200	500	200

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 추진방향

○ 포장 시공품질 향상

○ 현장 맟춤형 포장시공 관리 및 관리

○ 공사 조기 발주 및 예산 조기집행 : 상반기 50% 집행 목표

□ 세부 추진계획

《 포장 시공 품질 향상 》

○ 아스팔트 포장 내구성 향상

- 1등급 골재 사용으로 도로 손상 저감

- 교통량이 많은 곳 고내구성 포장으로 공용수명 향상

○ 서울형 포장설계법 시험포장 확대

- 포장 노후도, 교통량, 노면 지지력, 하부층 손상 여부등을 종합적으로 고려하여 적정 포장단면 산출 및 적용

- 코어 채취결과에 의거 하부층 손상시 하부 기층까지 정비

○ 관리감독 강화

- 시공현장 아스콘공장 용역사(감리)·사업소 합동 점검 실시

- 열화상카메라에 의한 아스팔트포장 다짐온도 관리

《 현장 맟춤형 포장 시공 관리 》

○ 광화문광장 차도구간 조기 정비로 시민 불편 해소

- 1단계(세종대로~횡단보도), 2단계(횡단보도~광화문)

《 예산 조기 집행 》

○ 발주 : 2017.2.월중 (계약심사 등 행정절차 사전 이행)

○ 착공 : 2017.3.월 (3월까지 실착공)

○ 예산 조기 집행 : 상반기중 50% 이상 (선금 및 기성금 지급 등 조치)

《 노후포장도로 정비공사 발주 계획 》

○ 대상 : 한천로 외 15개 노선

○ 효율적인 공사 추진을 위하여 공사 및 2개 권역으로 분리 발주

- 1구역 : 8개 노선 (한천로,한글비석로,상계로,노해로,인수봉로,도봉로,방학로,마들로)

- 2구역 : 8개 노선 (솔샘로,돌곶이로,석계로,화랑로,오현로,삼양로,종암로,인촌로)

※ 폐아스콘 처리 용역 및 차선도색공사 포함하여 분리 발주

○ 예산배분 및 세부 추진 일정

- 2월중 모든 공사 발주 완료

- 공사 실착공 : 3월중 착공                               (백만원)

공 사 명	예산액	발주예정	착공예정	준공예정	담당자	비고
합 계	10,536
노후포장도로정비공사-1구역	2,723	2.20.	3.20.	’17.12.20.	이화신	자재비 및 폐아스콘 처리 포함
노후포장도로정비공사-2구역	2,835	2.20.	3.20.	’17.12.20.	최완
긴급복구공사	1,843	2.10.	3.20.	’17.12.20.	최병수
광화문 차도정비공사	1,200	2.10.	3.20.	’17.8.30.	이화신
불량맨홀 정비공사	700	2.28.	3.31.	’17.12.20.	최완
한글비석로 저소음 포장공사	735	-	-	’17.6.30.	이화신
차선도색공사-1구역	250	2.10.	3.20.	’17.12.20.	최병수	자재비 포함
차선도색공사-2구역	250	2.10.	3.20.	’17.12.20.	최병수

※ 노후포장도로정비공사 포장단면 결정 : 코어채취 및 자문결과 반영

※ 관급자재 구매 및 폐아스콘 처리용역은 본공사와 동일 시기에 발주

□ 행정사항

○ 조기집행계획 보고 : 도로관리과.   끝.