“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰

1. 한양도성도감-4151(2016.12.8.)호와 관련입니다.

2. '한양도성 인왕산 성벽 붕괴구간 정밀조사 및 보수방안 마련'용역을 아래와 같이 변경 계약하고자 의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 한양도성 인왕산 성벽 붕괴구간 정밀조사 및 보수방안 마련

나. 용역기간 : 2016.8.31 ~ 2017.5.27

다. 계약금액 : 금152,246,000원

라. 변경사항 : 과업내용 추가, 계약금액 및 용역기간 변경

- 추가과업 내용 : 별도첨부(백악 성벽훼손구간 정밀조사 및 보수설계)

- 변경금액 : 금202,246,000원

- 변경기간 : 2016.8.31 ~ 2017.7.14

첨부 : 1. 관련방침 1부.

2. 추가과업 내용서 1부.

3. 용역 변경계약 산출내역 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	김종범		도성보존팀장	신추교		한양도성도감과장	01/16 심말숙
협조자	계약1팀장	조현
시행	한양도성도감-615	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 5층 한양도성도감	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2660	/전송	02-2133-1063	/	bum77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)