“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(고척돔구장 전광판 제작·설치)

우리부서에서 수행중인 아래 물품 계약에 대하여 준공기한 연기를 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 고척돔구장 전광판 제작

나. 계 약 자 : 삼익전자공업(주), 이재환

다. 계약금액 : 3,372,200,000원(삼십삼억칠천이백이십만원)

라. 계약일자 : 2016.12. 9.

마. 준공기한 연기내역

- 당초 : 2016.12. 9. ~ 2017. 2.25.

- 변경 : 2016.12. 9. ~ 2017. 3.31.

바. 귀책사유 : 국제대회인 WBC의 안정적인 개최와 2017년 프로야구 정규시즌을 대비하여 지속적인 테스트로 시스템의 안정화 필요.

첨부 : 삼익전자공업 합의각서. 1부. 끝.

							체육정책과장
주무관							이재익			체육시설팀장					이승헌					체육정책과장					02/24 이구석
협조자				계약1팀장						조현
시행			체육정책과-2550									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/
전화		02-2133-2694						/전송			02-2133-1064					/													/	대시민공개