문서번호	박물관과-2337
결재일자	2017.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	박물관사업1팀장	박물관과장
박기철	김지연	02/28 代김수현

서울공예박물관 건립

도시계획시설 변경결정용역 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

박물관과

서울공예박물관 건립

도시계획시설 변경결정용역 변경계획

북촌지구단위계획구역내로 도시․건축공동위원회 심의결과와 교통영향평가 결과 반영 후 용역을 종료하기 위하여 용역기간을 연장하고자 함

용역개요

□ 용 역 명 :  서울공예박물관 건립 도시계획시설 변경결정용역

□ 계약업체 : ㈜어울림엔지니어링(이승룡)

□ 계약금액 : 금76,543,860원(금칠천육백오십사만삼천팔백육십원)

□ 계약기간 : 2016. 6.29. ~ 2017. 2.28.

추진경위

□ ‘16. 6.29 : 용역 계약

□ ‘16. 7.26 : 건물 현황측량

□ ‘16. 9.28 : 관련부서 협의

□ ‘16.10. 4 : 도시계획예정선 현황측량

□ ‘16.10.12 : 제외부지에 대한 활용계획 제출(풍문여고)

□ ‘16.11.10 : 북촌지구단위계획결정(변경) 열람공고

□ ‘16.11.29 : 주민설명회

□ ‘16.12.30 : 설계용역 계약(’17.10.29일까지)

□ ‘17. 1.12 : 북촌지구단위계획결정(변경) 재열람공고

□ ‘17. 2. 8 : 도시․건축공동위원회 심의

계약변경내용

계약기간변경	당 초	2016. 6. 29 ~ 2017. 2. 28
	변경후	2016. 6. 29 ~ 2017. 4. 28

※ 계약금액 변동없음

계약변경사유

□ 교통영향평가 및 도시․건축공동위원회 심의결과를 반영하기 위하여 용역기간 2개월 연장

- 교통정책과-21554(2016.10.3.) (붙임2)

- 시설계획과-1950(2017.2.16.) (붙임3)

향후계획

□ 재무과에 계약변경 요청

【붙임】: 1. 계약변경 사유서 1부.

2. 교통정책과 공문 사본 1부.

3. 시설계획과 공문 사본 1부.

4. 합의각서(안) 1부.  끝.