투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	뚝섬한강공원 외 2개소 농구장 우레탄포장 철거공사 설계변경 및 준공기한 연기 시행

1. 녹지관리과-1147(2017.3.8.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 “뚝섬한강공원 외 2개소 농구장 우레탄포장 철거공사” 시행과 관련하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 뚝섬한강공원 외 2개소 농구장 우레탄포장 철거공사

나. 위    치 : 뚝섬한강공원 외 2개소(뚝섬, 잠실, 잠원)

다. 사업내용 : 농구장 우레탄포장(4,722㎡) 철거

라. 공사기간 : 2017. 2. 28 ~ 3. 9

마. 도 급 자 : ㈜청신종합조경 대표 손신자

바. 계약금액                                                    (단위 : 원)

구 분	금 액		증 감	비 고
	당 초	변 경
공 급 가 액	29,675,455	36,072,728	6,397,273
부가가치세	2,967,545	3,607,272	639,727
계	32,643,000	39,680,000	7,037,000

사. 설계변경 사유 : 현장여건에 따른 폐기물 물량 증가(14.16톤 → 30.69톤)

아. 준공기한 연기

1) 당 초 : 2017. 2. 28 ~ 3. 9

2) 변 경 : 2017. 2. 28 ~ 3. 17(8일 연장)

자. 준공기한 연기에 따른 귀책소재 : 한강사업본부

차. 지체상금 부과여부 : 미부과

카. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 유지관리, 시설비(100-401-01)

붙임 : 1. 설계변경 및 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	방일길		녹지관리과장	문경재		공원부장	03/09 문길동
협조자	주무관	심옥경		주무관	주홍열		총무과장	박병현
시행	녹지관리과-1158	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개