문서번호	설비부-11282
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 07/15 권오식
협조

‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2016. 07.

도시기반시설본부

(설비부)

‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사’ 관련, 관급자재 납품기한 연기를 위한 건설사업단 검토내용을 검토하고 보고드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 기계설비공사

❍ 공사규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 11,950㎡,

❍ 주요설비 : 공조·환기설비, 자동제어, 신재생에너지(지열) 및 소화설비 1식

❍ 공사기간 : 2015. 04. 15.~ 2017. 03.14.

❍ 공사금액 : 4,831백만 원(도급: 3,759 관급: 1,072)

❍ 시 공 사 : 유엔아이건설㈜

❍ 책임건설사업관리단 : ㈜선진엔지니어링(기계), ㈜영화키스톤건축사사무소(소방)

2		관련근거

❍ ㈜영화키스톤건축사사무소 서도기–기-100 : 관급자재(냉난방기외1) 납품기한 연기요청

3		검토보고내용

❍ 연기 사유

- 선행 공종(건축) 지연에 따른 후속 공종인 기계설비(관급자재) 납품기한 연기

❍ 납품기한 연기 내용

관급자재명 (계약번호)	계 약 자	계약금액(원)	납품기한		비고
			당 초	변 경
냉난방기 1 (00158118102)	삼성전자㈜	75,869,150	’16.03.29. ~ ’16.07.30.	’16.03.29. ~ ’17.03.14.	- 계약금액 변경없음 - 227일 연기
냉난방기2 (00158144300)	〃	7,172,000	’16.03.29. ~ ’16.07.30.	’16.03.29. ~ ’17.03.14.	- 계약금액 변경없음 - 227일 연기
고무발포단열재 (00157039601)	㈜하이코리아	135,870,410	’16.03.30. ~ ’16.09.19.	’16.03.30. ~ ’17.03.14.	- 계약금액 변경없음 - 176일 연기

❍ 납품기한 연기 귀책 기관 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 건설사업관리기술단 검토의견

- 선행 공종 지연에 따른 납품기한  연기요청 내용이 적정한 것으로 판단됨.

4		조치의견

❍ 건설사업관리기술단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에   맞게 관급자재 납품기한을 연기하여 공정 관리에 만전을 기하고자 함.

따로 붙임 : 관급자재 납품기한 연기 관련 문서 1부.