“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	창신숭인 도시재생선도지역 도시재생활성화계획 수립 용역 계약변경 의뢰

1. 주거재생과-4236호(2017.3.30.)와 관련입니다.

2. ‘창신숭인지역 채석장일대 명소화사업 기본계획 수립용역(1단계)’에

대하여 아래와 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 창신숭인지역 채석장일대 명소화사업 기본계획 수립용역(1단계)

나. 용역기간 : 2014. 8. 5. ~ 2017. 4. 2.

다. 계약금액 : 금228,000,000원

라. 계 약 자 : ㈜태하엔지니어링건축사사무소

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2014.09.15-2015.12.28	‘16.8.5~‘17.6.30	증)89일

마. 계약변경 내용

바. 변경사유 : 자문회의 운영결과 본 용역과 별도로 아이디어공모, 채석장벽면 안전진단 선행이 필요하여 과업기간을 연장하여 원활한 용역수행 및 결과의 완성도를 높이고자 함

붙 임 : 1. 용역 설계변경 계획 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	주거재생과장
주무관	소석영		주거재생계획팀장	김승훈		주거재생과장	03/30 국승열
협조자
시행	주거재생과-4248	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-7171	/전송	02-2133-0747	/	bballl92@seoul.go.kr	/	부분공개(5)