투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	『탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 공사』 설계변경 자문위원회(소위원회) 자문요청

우리부에서 시행중인 「탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 공사」와 관련하여 공사기간 연기로 인한 간접비 반영에 대한 설계변경 자문위원회(소위원회) 자문을 아래와 같이 요청 하오니 공사준공 기간이 2017.4.30.임일 감안하여 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문위원회(소위원회) 자문내용

- 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 공사

- 공사기간 : 2013.10.1.~2017.4.30.

- 자문내용

(단위 : 천원)

공 사 명	자 문 내 용	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증.감
탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 공사	공사기간 연장에 따른 간접비 반영	7,273,459	7,352,637	79,178

붙임  1. 설계변경 소위원회 자문요청서 1부.

2. 공사기간 연장에 따른 간접비 심의위원회 개최결과 보고 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	송민영		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	03/31 남궁용
협조자
시행	방재시설부-5436	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8762	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개