문서번호	치수과-1817
결재일자	2017.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
권혁제		신용철	05/10 박상돈
협조	주무관		정상범
	주무관		방호익

- 여의샛강 유지유량 확보 소규모 환경영향평가 -

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5

한강사업본부 치수과

- 여의샛강 유지유량 확보 소규모 환경영향평가 -

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

용역시행 중 오염원인 파악을 위한 추가조사 등에 따른 설계변경 및  준공기한 연기 검토내용을 보고 드림.

용역 개요

○  용 역 명 : 여의샛강 유지유량확보 사업 소규모 환경영향평가

○  과업내용 : 환경현황 분석 및 조사․예측․평가․보전방향 제시

○  용역기간 : ‘16. 12. 21~ ’17. 5. 19 (계약금액 : 69,340천원)

○  도 급 자 : 주식회사 유신 대표 성낙일

추진 경위

○  ‘16. 10. 12 : 여의샛강 유지유량 확보 기본 및 실시설계용역 착수

○  ‘16. 12. 21 : 소규모 환경영향평가 용역 착수

○  ‘17.  2. 14  : 토양(퇴적토) 조사

○  ‘17.  3.  3  : 환경질(대기질, 악취, 수질 등) 측정

○  ‘17.  4. 14 : 여의샛강 유지유량 확보 기본계획 자문회의 개최

보고 내용

○  근    거 : 실정보고 [주(유신) 환경-17-1788호(‘17.5.8)]

○  설계변경

- 2~3월 중 토양 및 환경질 조사을 수행하였으나 오염원인이 검출

되지 않아, 오염원인 파악 및 분석을 위한 추가조사 필요

○  준공기한 연기

- 추가조사 및 관련기관 협의를 위한 추가 과업기간 필요.

변경사항 검토

○  추가조사에 따른 설계 변경

- 토양 및 환경질 조사결과 오염원인이 검출되지 않아, 기온 상승 시 추가

조사를 시행하여 부패 등에 따른 악취 및 수질오염 원인 파악이 필요함.

- 추가조사 항목 및 예산

구 분	조 사 항 목	금 액 (원)	비 고
악 취	복합악취, 메틸메르캅탄, 황화수소, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이드	2,640,601	5개 지점 1회 추가
퇴 적 토	T-N, T-P, 유기탄소	338,490	5개 지점 1회 추가
부가가치세		297,909
계		3,277,000

- 소요예산 조치 : ‘16년 사고 이월된 한강관광자원화사업비(국비) 활용

○  계약기간 변경

- 악취 및 수질오염원인 파악을 위한 추가조사 및 설계중인 준설계획 반영, 협의기관(한강유역 환경청)과의 업무추진을 위한 기간이 추가로 필요함.

- 계약기간 변경 내용

당 초	2016. 12. 21 ～ 2017. 5. 19 (5개월)
변 경 후	2016. 12. 21 ～ 2017. 8. 19 (8개월)

조치계획

○  다음과 같이 계약변경 후 용역추진에 철저를 기하고자 함.

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	69,340 천원	72,617 천원	증 3,277천원
계약기간	‘16. 12. 21 ～ ’17. 5. 19	‘16. 12. 21 ～ ’17. 8. 19	증 3개월

○  계약부서에 변경계약 요청.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 실정보고 [주(유신) 환경-17-1788호(‘17.5.8)] 1부.  끝.