문서번호	토목부-9643
결재일자	2017.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
이상욱B	여용석	05/12 김영수
협 조

설계용역 준공기한 연기 검토보고

[사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로확장 기본 및 실시설계]

2017. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계용역 준공기한 연기 검토보고

[사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로확장 기본 및 실시설계]

도시철도공사의 외부전문가 기술자문회의 요청 및 협의지연 등    향후 행정절차(기술자문회의,설계VE) 수행을 위한 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하고자 검토보고 드림

※ 준공기한 : 당초) 2017. 5.23. → 변경) 2017. 9.14.(증120일)

▢ 용역 개요

◦ 용 역 명 : 사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로확장 기본 및 실시설계

◦ 규    모 : 도로확장 폭4차로→6차로 618m

◦ 용역기간 : 2016.5.23. ~ 2017.5.17.

◦ 용역금액 : 347,360,000원

◦ 용 역 사 : ㈜수성엔지니어링

▢ 근 거 : 수성 제2017-1274호(2017.5.11.) 용역기간 연장 요청

▢ 추진현황

○ '07.03.~12. :  타당성조사 및 기본계획 용역시행(용역사: 삼보기술단)

○ '14.04.~'15.01.: 타당성조사 및 기본계획 보완용역시행(용역사: 동일기술공사)

○ '15.08.28    :  투자사업 심사(적정)

○ '16.05.23    :  기본 및 실시설계 용역 착수(용역사: 수성엔지니어링)

○ '16.06.22    :  착수보고 (도로계획과)

○ '16.12.30    :  기본설계 VE

○ '17.01.11    :  기본설계단계 용역완료

○ '17.01.12    :  실시설계 이관 요청 (도로계획과 → 토목부)

○ '17.03.02    :  기본설계 자문회의 (도로계획과)

○ '17.03.08    :  기본설계 주민설명회 (도로계획과)

▢ 보고내용

가. 용역기간 변경                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
용역기간	'16.05.23.~'17.05.17.	'16.05.23.~'17.09.14.	증)120일

나. 준공기한 연기 사유

◦ 도시철도공사 외부전문가 기술자문회의 요청 및 협의지연

→ 지하철 7호선 남성역 외부출입구(1,2번)이설 및 환기구 단면·위치 변경에 따라 도시철도공사의 외부전문가 기술자문 요청 및 협의 지연

→ 도시철도공사 요구사항

- 기술심의는 도시철도공사 외부전문가 기술자문 시행

- 출입구 및 환기구 이설에 따른 세부사항은 우리공사와 별도 협약체결 후 시행

- 공사 중 하수박스 매달기 등 환기구 구조물 시공계획 면밀히 수립

- 외부 출입구 동시 폐쇄시 민원발생이 우려됨에 따라 단계별 공사시행

- 환기구 이설 완료 후 시험검시하여 실측풍량 미달시 송풍기 용량 증대 등

위 치 도

◦ 도시철도공사 요구사항 반영 및 행정절차(실시설계 자문회의,  설계VE) 수행을 위한 절대공기 부족에 따라 준공기한 연기가 필요

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 향후계획

◦ '17. 6. : 실시설계 자문회의

◦ '17. 7. : 실시설계 VE

◦ '17. 9. : 실시설계 완료

붙임 : 용역기간 연장요청 공문 1부.  끝.