문서번호	소방행정과-6103
결재일자	2017.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
장비회계팀장		소방행정과장	소방서장
박송영		남성현	05/16 서순탁
협조
	담당자		신춘수

미근 119안전센터 조기 이전 사유 발생보고

2017.05

서대문소방서

(소방행정과)

미근 119안전센터 조기 이전 사유발생 보고

최근 실시한 소방청사 공기품질 평가 결과 암발생 유발 성분의 다량 검출 및 서대문 경찰서 사무공간 협소에 따른 이전 요청, 이전 예정부지 주민의 조기 착공요구 등 사유로 소방안전 5개년 투자계획의 재 검토를 요청하고자 함

□ 관련근거

1. 지방재정 투자사업 심사 및 타당성 조사 매뉴얼 (2016. 12. 행정자치부)

2. 소방안전 5개년 투자계획 (안) (2016. 11.02. 서울소방재난본부)

○ 소방청사의 현대화 -  노후청사의 현대화

3. 서대문소방서 미근119안전센터 이전 협조(2017.5.15. 서대문 경찰서)

○ 서대문경찰서 위탁개발추진에 따른 미근동119안전센터 청사 이전 협조

4. 소방청사 (차고) 유해물질 분석 연구결과(2017.02. 서대문소방서)

○ 차량 시동점검시 발암물질(HCHO, NO₂) 허용농도 초과 검출

□ 소방안전 5개년 계획 변경의 필요성 검토

1. 소방안전 5개년 계획 (2016년도 - 당초 안)
구 분			사용연수(준공후)
			35년이상	35∼30년	30년 미만
적 정 연면적 율(%)	65%이하		1순위	1순위	비대상
	65∼85% 이하		1순위	2순위	비대상
	85% 초과		1순위	2순위	비대상
＊ 1순위 10개소 : 소방서 2개소/ 119안전센터 8개소(도봉, 장위, 운동장, 면목, 망우, 상도, 미근, 우이) - 미근119안전센터 이전 신축 (사업연도 ‘19∼’20)

2. 계획 변경을 초래한 事情의 발생

가. 소방청사 유해물질 분석 결과 발암물질 검출로 근무환경 개선 필요

○ 2017. 2.1.∼ 2. 15 기간 중 5일에 거처 국민안전처협조로 소방청사 유해물질을 분석한 결과 미근 119안전센터의 차고에서는 암을 유발하는 유해물질로 분류된 포름알데히드(HCHO), 이산화질소(NO₂) 가 기준치의 2.4배 및 5.9배가 검출되어 직원 근무환경의 개선이 급박한 사유로 대두 됨

나. 서대문 경찰서 신축사업 관련 업무 협조 (2017.5.15.)

○ 경찰청 부지내에 입주한 미근119안전센터의 신속한 이전으로 서대문경찰서 청사의 위탁개발 및 비좁은 사무공간 확보 협조를 요청 함

현재 미근 119안전센터가 사용하고 있는 청사부지는 경찰청 소유의 토지에 서울시 건물이 들어서 있는 상태로 경찰서의 재건축을 위하여 퇴거를 요청하고 있는 상태 임

다. 북아현 1-3 재정비 촉진구역 주택재개발 정비 사업조합 조기착공요청

○ 119안전센터 부지의 조기 착공으로 주민의 소방서비스 사각지대 해소    및 장기간 방치에 따른 미관 저해요인 해소 해 주시 바람

(2017.04. 북아현 1-3지구 주택재개발 정비 사업조합 이사)

인근지역 민원발생 사항 : 119안전센터 공공청사 부지와 접속되어있는 복주산공원 개발 시 입주민의 계획변경요구 민원제기로 3개 월간 공사가 중지되어 최근에 설계변경(미관저해 한옥 건축물 착공계획 폐기) 후 공사가 재개 되는 우여곡절이 있는 곳으로 나대지 상태로 방치 할 경우 다양한 형태의 민원이 제기 될 것으로 예상 됨

□ 검토결과

서대문소방서 의견

○ 발암물질에 노출된 직원의 근무 환경개선은 촌각을 다투는 미룰수 없는 시급한 과제이며, 서대문 경찰서의 사무공간 협소를 사유로 외부청사를 임대를 섭외하는 등 미근 119안전센터의 이전을 수 회(數回)에 거쳐 요청하고 있으며, 공공부지의 조기 개발을 바라는 주민의 민원 등을 고려할 때 청사부지가 확보된 상태인 만큼 2018년에 조기 착공하도록 하는 것이 필요하다고 사료 됨.

참고사항

○ 예정부지 확보 됨 : 서울시 서대문구 북아현동 144-19, 1,673㎡(506.1坪)

○ 청사규모 : 양식 철근3/1층, 900㎡( 건폐율 60%, 용적율 200%이하 )

○ 조기 이전 착공 추진일정(안)

① 북아현 1-3 재정비 촉진구역 기간사업종료 소유권 확보 : 2017. 08.

② 설계 : 2017. 9 ~ 12

③ 공사기간 : 2018년 상반기 착공, 하반기 완공

④ 이전 및 운영 : 2019년.  끝.