문서번호	방재시설부-9170
결재일자	2017.5.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김상용		이도헌	05/30 남궁용
협조

서울제물포터널 민간투자사업(1공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

건설사업관리기술자 투입계획 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5

도시기반시설본부

(방재시설부)

서울제물포터널 민간투자사업(1공구) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

건설사업관리기술자 투입계획 변경 검토 보고

『서울제물포터널 민간투자사업(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역』과 관련하여 상주 건설사업관리기술자 투입계획을 공사 공정율을 감안하여 등급조정및 외국인기술자 실 투입 정산 등을 반영하여 투입계획 변경 보고 임.

관련근거

○ ‘17.04.05 : 건설사업관리기술자 투입계획 변경 승인 요청

[동부엔지니어링(발) 2017-831호)]

○ ‘17.04.20 : 건설사업관리기술자 투입계획 변경 승인 요청

[제물포터널 제17-83호]

○ ‘17.04.21 : 투입계획은 공사 공정율에 비해 건설사업관리 공정율이 상대적   으로 높으므로 재검토 지시[방재시설부-6844호]

건설사업관리용역 개요

○ 계 약 일 : 2015.09.14

○ 용역금액 : 9,131백만원

○ 용역기간 : 2015.09.16 ~ 2020.10.18(62개월)

○ 용역업체 : 동부엔지니어링(주) 외 7개사

[건설사업관리용역 - 공사] 공정율 비교

○ 공정율 차이 비교 분석(2017년말 기준)

구 분	당 초	변 경	비 고
‘17년말 공사 공정율(ⓐ)	17.17%	17.17%
건설사업관리 기성율(ⓑ)	33.74%	28.94%
차 이 (ⓒ = ⓑ - ⓐ)	16.57%	11.77%
외국인기술자(공제) (ⓓ)	6.77% (618백만원)	5.41% (494백만원)
순수 차이 (ⓔ = ⓒ - ⓓ)	10.02%	6.36%

○ 공사와 감리용역 공정율 차이 발생사유

- 시점부 국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업과 연계된 상수관(∅1,000mm, ∅2,000mm) 이설 협의 지연으로 개착 및 터널공사 착수 지연되어 공사 공정율과 건설사업관리단 투입 공정율 차이가 발생됨

: 건설사업관리단 공정율은 공사 착공공정에 맞추어 투입되어 초기 과다 인력투입

※ 외국인 기술자(1인)

: 국내 건설사업관리 제도 개선 연구과제를 주업무, 터널분야 기술지원업무 수행

→ 상주 건설사업관리의 업무분담 효과는 미흡 함.

상주 건설사업관리기술자 변경 투입계획

□ 공사 공정율 및 외국인기술자 실투입(정산)을 반영한 투입계획 조정

∙ 감리원 등급조정(특급 → 고급) 및 투입기간 조정, 외국인기술자, IPT 추가업무 등 실 투입으로 정산 ⇒ 공사 Peak 기간(‘18.1월 ~ ’20.4월)에 투입예정

□ 상수도분야 실 공정을 고려하여 투입기간 조정 정산

○ 기술자 등급 조정 및 외국인기술자 관련 정산                (단위 : 인월)

구 분			당 초	변 경	증 ∙ 감	비 고
등급 조정		특급	59.250 - ‘16.2.16 ~ ’20.4.17	14.597 - ‘16.5.23 ~ ’17.5.31	-44.653	-6.971
		고급		37.682 - ‘17.6.1 ~ ’20.7.21	37.682
정산	외국인	고급	59.000 - ‘15.11.16 ~ ’20.10.18	48.271 - ‘16.3.14 ~ ’16.12.16 - ‘17.7.17 ~ ’20.10.18	- 10.729	-13.74 (국내노임× 1.78배)
		중급	3.011 - ‘20. 7. 1 ~ ’20.10.18	-	- 3.011
	통 역	개월	62.00	55.32	- 6.680
	항공료	회	20.67	15.67	- 5
	IPT보고서	회	10.4	7.4	-3
	Work Shop	회	5.2	4	-1.2

○ 기술자 투입기간 조정                                      (단위 : 인월)

구 분		당 초	변 경	증 ∙ 감	비 고
실 투입기간 조정	중급	15.106 - ‘16.10.16 ~ ’18.5.24	23.640 - ‘18.1.1 ~ ’20.6.30	8.534	8.534
	검측	27.045 - ‘16.08.16 ~ ’20.2.4	27.045 - ‘17.4.20 ~ ’20.10.5	-
추가 투입 (등급 조정 +외국인기술자 등 정산분)	중급	-	18.912 - ‘18.5.1 ~ ’20.4.30	18.912	31.402
	중급	-	12.490 - ‘18.8.1 ~ ’19.11.26	12.490

○ 상수도분야 투입기간 정산                                 (단위 : 인월)

구 분		당 초	변 경	증 ∙ 감	비 고
용접	고급	8.545 - 16.7.25 ~ ’17.4.13	8.374 - 16.7.25 ~ ’17.4.9	- 0.171 (감 4일)	실공정 고려 하여 정산
토목	고급	8.545 - 16.7.25 ~ ’17.4.13	8.716 - 16.7.25 ~ ’17.4.20	0.171 (증 4일)

조치계획

○ 건설사업관리용역비                                        (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 ∙ 감	비 고
도 급 비	9,131	9,131	변경없음

○ 상기와 같이 공사 공정율을 고려하여 상주건설사업관리기술자 등급 조정 및 감리원 투입기간 조정, 외국인기술자 투입 등 정산에 따른 여분의 투입인력은 공사 Peak 기간에 투입코자 하는 건설사업관리단의 투입계획은 적정한 것으로 판단되어 승인코자 하며, 외국인기술자 및 건설사업관리기술자의 투입인력 관리는 추후 공사 공정률을 감안하여 탄력적으로 운영코자 함.

붙  임 : 1) 관련문서 1부.

2) 내역서 1부. 끝.