문서번호	기반시설과-2262
결재일자	2017.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
이건용	박일연	05/31 박상돈
협 조
	★주무관			심옥경
	주무관			조운행

공사 설계 변경 검토 보고(준공)

- 서부이촌동 보행육교 설치 전기공사 -

2017. 5.

한강사업본부

(기반시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

공사 설계 변경 검토 보고(준공)

서부이촌동 보행육교 설치 전기공사 -

「서부이촌동 보행육교 설치 전기공사」와 관련하여 제출된 설계변경 건에 대하여 계약물량 및 도급비 변경 내용을 정산, 설계변경하여 공사 준공에 만전을 기하고자 함

1. 공사개요

○ 위    치: 서울시 용산구 이촌로2가길 36

○ 규    모: 보행육교 폭4m, 연장 50.4m, 승강기(15인용) 2대

○ 사업기간: ‘16. 05. 04. ~ ’17. 05. 31.

○ 계약금액: 금164,458,590원

○ 시 공 사: 진경파워콤 주식회사

2. 설계변경 사유

○ 실정보고 사항

- 공사감독3처-7555(2016. 9. 1.)

: 고재물량 변경, 철거물량 변경, 가설전기 케이블 변경, 교통통제

- 공사감독3처-1981(2017. 3. 24.)

: 전력 및 통신케이블 배관 시공 방법 변경

: 한강공원 족구장 분전반 이설

: 승강기 입구 추가 조명 설치(4개소)

○ 유지보수 관련

- 한강공원 족구장 분전반 기초 추가 설치

○ 현장 여건

- 계단 조도확보를 위한 등기구 추가 설치(32EA)

3. 설계변경 내역

○ 공사비(도급) 증감 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	245,434,350	261,918,340	증)16,483,990
도 급 비	164,458,590	177,738,000	증)13,279,410	부가세 포함
관급자재	72,828,760	80,521,740	증)7,692,980
이 설 비	8,147,000	3,658,600	감)4,488,400

○ 도급비 변경 주요내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
전력설비공사	70,820,999	87,536,749	증)16,715,750
1-1. 철거공사	6,266,028	5,818,470	감)447,558	철거물량 감소
1-2. 공사중 전기공사	30,592,374	35,408,119	증)4,815,745	교통처리
1-3. 전력설비공사	33,962,597	46,310,160	증)12,347,563	원효대교 가로등 철거 및 신규 설치
2. 경관조명 설비공사	11,397,448	14,056,041	증)2,658,593	조명회로 변경으로 인한 물량 변경
3. CCTV 설비공사	14,796,792	10,024,763	감)4,772,029	배관 시공 방법 변경

4. 조치의견

○ 기 실정보고 된 사항과 유지보수 및 현장여건을 반영해 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

○ 설계변경으로 인한 추가 소요예산은 이설비(토목) 사용 조치

- 예산과목: 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선

서부이촌동 보행육교 개선, 시설비

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부

2. 제비율 검증 확인서 1부

3. 설계변경제출(감독대행공문) 1부.  끝.