문서번호	주차계획과-7096
결재일자	2017.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		전태호	06/01 오진완
협조

수송초등학교 지하주차장 건설 (강북구) 예산교부 검토

2017. 6.

도시교통본부

(주차계획과)

수송초등학교 지하주차장 건설 예산교부 검토

강북구에서 추진중인『수송초등학교 지하주차장 건설사업』관련 ‘17년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 강북구 한천로124길 14,번1동 (수송초교, A=26,383㎡)

○ 규    모 : 주차면수 185면 (지하1~지하2층, 연면적 7,044㎡)

※ 정보도서관, 급식실, 체육관 등 (지상1~3층, 연면적 3,592㎡)

○ 총사업비 : 9,000백만원 (시비 6,300, 구비 2,700)

구 분	총사업비	투 자 계 획					비고
		‘13	‘14	‘15	‘16	‘17
계	9,000	1,700	1,500	2,900	2,000	900
시 비	6,300	-	500	2,900	2,000	900
구 비	2,700	1,700	1,000	-	-	-

○ 사업기간 : ‘15.7 ~ ‘17.8

Ⅱ. 추진현황 및 향후계획

○ ‘12.9 : 주차장 건립 추진계획 수립

○ ‘12.11 : 시 투자심사

○ ‘13.4~8 : 시교육청 및 교육과학기술부 투자심사

○ ‘13.10 : 복합화사업 협약체결 (강북구-성북교육지원청)

○ ‘14.8~’15.3 : 기본 및 실시설계 용역

○ ‘15.3~’15.7: 일상감사 및 조달청 계약 등

○ ‘15.7.10 : 공사 계약

○ ‘16.11~’17.5 : 시설(주차장)결정 협의 (교육지원청 5.31 동의)

○ ‘17.8.15 : 준공 예정

○ ‘17.10.  : 도시계획 중복결정 절차 이행 (강북구)

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 수송초등학교 지하주차장 건설 시비예산 교부 요청

- 관련공문 : 2017년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 강북구 주차관리과-11823호 (‘17.6.1)

□ 주차장 분야별 사업비                        (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비 고
계		9,000	6,300	2,700
보상비	토지,건물	-	-	-	-	해당없음
설계용역	설계용역	180	126	54	‘14.4	준공금액
공사발주	토목,건축	7,937	5,557	2,380	‘15.4	발주금액
	전 기	171	119	52	‘15.4
	통 신	198	138	60	‘15.4
	소 방	274	192	82	‘15.4
감리비	시공감리	240	168	72	‘15.4

□ 예산교부 검토(주차장건설)

○ 사업비 교부 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘16년 이전	‘17년			‘18년 ~	비고
			계	기교부	금회교부
계	9,000	8,100	900	-	900	-
시 비	6,300	5,400	900	-	900	-
구 비	2,700	2,700	-	-	-	-

※ 수송초교 복합화시설 증축공사 –市성북강북교육지원청 공사시행

□ 요청 사유

○ 동 공사 4차계약분 공사진행을 위한 시비 잔여예산 교부 요청

□ 검토 의견

○ 도시계획 시설(주차장) 중복결정 관련 관할 교육청의 동의에 따라 (‘17.5.31) ’17.10월 까지 자치구 도시계획 결정 절차 이행 예정임 ※ 자치구 향후 추진일정 제출받아 이행 확인 예정

○ 동 사업은 현재 내·외부 마감공사 진행중으로 (‘17.8.15한 준공 예정) 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단됨 (공정 87%)

○ 건설공사 집행에 필요한 ‘17년 편성된 시비 9억원 요청하는 사항으로 공사가 원활하게 이루어질 수 있도록 예산 교부코자 함

붙임   관련공문 등 1부.   끝.