문서번호	총무과-20979
결재일자	2017.6.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		박동규	06/16 정상택
협조

시청사 재난예방 및 피해경감계획 작성

용역준공기간 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

행  정  국

(총 무 과)

시청사 재난예방 및 피해경감계획 작성

용역준공기간 연장 검토 보고

현재 용역 추진중인「시청사 재난예방 및 피해경감계획 작성용역」건에 대해 중간보고회 자문내용 보완(추가과업)과 관련기관 협의 등에 절대기간이 부족하여 용역기간을 조정코자 보고 드림

□ 관련근거

❍ 시청사 재난예방 및 피해경감계획 작성용역 중간보고회 결과보고

❍ 용역사의 준공기한 연기요청 공문(KFFP-17042/00,2017,6.16)

□ 용역계약 현황

❍ 용 역 명 : 시청사 재난예방 및 피해경감계획 작성용역

❍ 계약업체 : 한방유비스(주) 대표자 황현수

❍ 계약금액 : 금13,900천원

❍ 계약기간 : ‘17.4.27 ~ 17.6.26

□ 용역기간 변경 및 사유

❍ 기간변경 : 15일 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2017.4.27.~ 6.26(61일)	2017.4.27.~ 7.11(76일)	15일 연장

❍ 연기사유 : 용역결과물 관련기관에 제출, 협의에 따른 절대기간이             부족하여 연장 필요

☞ 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제10조(영13조)

(재난예방 및 피해경감계획 수립 세부지침의 절차)

관리주체 (서울시청)	→ (1차:제출)	해당구청	→ (3일이내)	해당소방서
	→ (2차:수정보완시 10일이내제출)		← (15일이내)

❍ 연기기한 : 2017년 7월 11일(연장기간 15일)

❍ 귀책소재 : 서울시

❍ 지체상금 부과여부 : 계약상대자의 귀책사유가 아니므로 지체상금 미부과

□ 보고자 의견

❍ 용역 중간보고회(17.6.12.) 자문의견 보완(추가과업) 및 관련

기관(중구청 등) 제출 후 협의에 필요한 절대기간이 부족하고

❍ 또한, 발주처의 행정진행 사유로 계약금액 변경없이 용역준공기한을

연기하는 것이 타당함..

- 준공기한

․ 당 초 : 2017. 4. 28 ~ 6.26

․ 변 경 : 2017. 4. 28 ~ 7.11

- 계약금액 : 변경없음

□ 행정사항

❍ ‘17. 6   용역준공기간 조정에 따른 계약변경 의뢰(→재무과)

❍ ‘17. 6   용역성과품 관련기관에 제출(→중구청)

붙 임 : 합의서 1부. 끝.