문서번호	도로보수과-6001
결재일자	2017.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	이석재	06/22 신응수

『2017년 불량맨홀정비공사(연간단가)』 설계변경(1회) 검토 보고

2017. 6.

북부도로사업소

[도로보수과]

설계변경(제1회) 검토 보고

- 2017년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가) -

우리 사업소에서 시행중에 있는『2017년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』와 관련 민원사항 및 안전사고 예방 추진를 위한 검토보고 사항임.

공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 공사개요 : 불량맨홀정비 471개소

○ 공사기간 : 2017.03.13 ~ 2017.12.31

○ 공사금액 : 426,745,890원

○ 도 급 자 : ㈜옥련건설  대표 김정옥

설계변경 사유

○ 유관기관별 맨홀정비에 따른 공종별 수량내역 조정이 필요

○ 불량맨홀시 도로평탄성 유지를 위한 추가 커팅부 물량 반영

- 계약에는 기본컷팅(하수 20cm, 통신 15~18cm, 상수도 30cm)으로

일률적으로 설계되어 있으나,

- 맨홀정비시 주변 도로침하, 파손 등 도로평탄성 유지위해 현장 도로

상태부위에 따라 추가 컷팅(5~15cm, 57개소) 반영이 필요함

· 추가컷팅 : 하수도(10~15cm, 15개소), 통신(10~15cm, 33개소)

상수도(5~15cm, 9개소)

설계변경 내역

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		426,745,890	500,000,000	증) 63,254,110
도급비	공급가액	387,950,809	445,454,546	증) 57,503,737
	부가가치세	38,795,081	44,545,454	증) 5,750,373
	계	426,745,890	490,000,000	증) 63,254,110
이 전 비		10,000,000	10,000,000	-

○ 주요공종 변경물량

공 종	규 격	구분	단위	수 량			증 ․ 감	비 고
				당 초	변 경
하 수	∅648	주,야간	개소	72		152	증 80
상 수	∅648	주,야간	개소	71		120	증 49
하수,통신	∅766	주,야간	개소	72		95	증 23
통신,전기	∅918	주,야간	개소	72		60	감 12
통신,전기	∅1180	주,야간	개소	64		32	감 32
통신,전기(사각)	1080*580	주,야간	개소	54		33	감 21
특수소형	∅256	주,야간	개소	66		46	감 20
계			개소	471		538	증 67

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 도로평탄성 확보를 위한 유형별 수량조정과  맨홀정비 증가분(67개소) 및 추가커팅에 따른 비용은 낙찰잔액(63,254천원)을 활용 예산범위내에서 설계변경을 시행 불량맨홀정비 사업추진에 만전을 기하고자 함 .

첨부 : 설계변경도서(1회) 1부.   끝.