	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	집하장내 건설폐기물 처리용역 설계변경 시행

1. 시설과-3648(2017. 6.26)호와 관련 집하장내 건설폐기물 처리용역에 대하여 붙임 설계서에 의거 아래와 같이 설계변경코자 합니다.

가. 용역명 : 집하장내 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : 2017. 4. 5 ~ 2017.11. 13

****************************

******************************

****	****	****	***	***
***	***********	***********	*
****	*************	*************	*

마. 설계변경사유 : 당초 폐기물 산정물량이 발생량을 예측한 추정 물량으로 실제 처리물량 변동에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비

붙임 :  1. 보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

전문관	서동민		시설과장	공헌구		관리부장	06/26 代이행용
협조자	총무과장	이행용
시행	시설과-3686	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7442	/전송	507-7230	/	baekgu2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)