투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시) 및 교통신호기 원인자 공사 준공기한 연기 요청

1. 동부도로사업소 도로보수과-11913(2016.12.13.), 기전과-16524(2016.12.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부 건설사업으로 시행하는 “잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)”관련 교통안전시설물(노면표시) 및 교통신호기 원인자 공사 준공기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

구 분	당 초	변 경	사 유
노면표시	공사승인일로~2017.05.31.	공사승인일로~ 2017.07.15.	부대공사 미비에 따른 준공기한 연기
교통신호기	공사승인일로~2017.05.31.	공사승인일로~ 2017.07.15.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
주무관	송영배		주무관	이병환		방재시설부장	06/27 남궁용
협조자
시행	방재시설부-11019	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개