문서번호	시설개선과-6960
결재일자	2017.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		최용덕	06/29 代김남대
협조	운영기획과장		김남대
	주무관		지양수

- 잠실주경기장 -

기계설비 자동제어 구매설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6. 28(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

잠실주경장 기계설비 자동제어 구매설치 계획

잠실주경장 기계설비 수동제어를 중앙제어 시스템으로 변경하여 효율적인 운전관리로 사고예방 및 절전 운전으로 에너지를 절약하고 시민들에게 쾌적한 환경에서 이용할 수 있도록 개선공사를 시행하고자 함

Ⅰ		근 거

□ 2017년도 세출예산

□ 2017 ~ 2021년 중기재정계획(지방재정법 제33조)

□ 2016년 국가안전대진단 관련 민관합동 안전점검결과 지적사항

: 시설개선과-4692(2016. 5. 9) 잠실주경기장 기계실 수동방식 제어

Ⅱ		기계설비 현황 및 문제점

□ 주경기장 기계설비 현황

품명	규격	대수	품명	규격	대수
냉동기	400RT	3	보일러	2톤	5
	210RT	1		4.5톤	1
냉각탑	600RT	3	물탱크	750톤	1
	400RT	1		250톤	1
공기조화기	300~600CMH	4	급수펌프	30HP외	14
배수펌프류	5HP외	18	탱크류	5,000L외	4
냉난방펌프류	75HP외	16	휀류	2HP외	9

□ 문제점

○ 잠실주경기장은 준공이후 기계설비의 노후로 기기의 보수 및 수리를 하여 사용하고 있으나 내구년한 경과 및 배관 부식이 심하여 성능이 저하되어 안전사고 발생우려

○ 주경기장 기계설비의 개별제어에 따른 운전시간 및 에너지 낭비

○ 수동제어로 인한 기계설비의 효율적인 데이터 관리 부족

Ⅱ		개선방법 및 효과

□ 개선방법

○ 수동으로 관리하고 있는 기계설비를 중앙제어 시스템으로 변경

- 주경기장 기계설비 개략 계통토

□ 기대효과

○ 기계실 중앙감시, 원격제어가 가능하여 안정된 기계설비 운영으로 인한 사고          위험 대처가 빠름

○ 알람 및 이상신호 대한 빠른 대처가능으로 효율적인 운전관리로 에너지 절감

○ 검출데이터 및 측정값의 확보로 신뢰성 및 장비의 유지관리의 정확성

Ⅱ		사업개요

□ 공 사 명 : 잠실주경기장 기계설비 자동제어 구매설치 공사

□ 사업내용

- 중앙관제장치, 통합관리시스템, 온도․압력센서류, 제어밸브류, 전선관 등

□ 사 업 비 : 450,000천원

□ 공사기간 : 착공일로부터 60일
□ 발주방법 : 조달계약

□ 소요예산 : 449,573천원(조달수수료 포함)

□ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업, 잠실종                 합운동장․구의야구공원시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅲ		추진사항 및 향후 일정

□ 2017. 04. ~ 05 : 현장조사 및 도면작성

□ 2017. 05. ~ 06 : 수량산출 및 내역서 작성(산출기초 조사)

□ 2017. 06. ~ 07 : 계획서 수립 및 공사발주(조달청 의뢰)

□ 2017. 09. : 준공

Ⅴ		조치의견

□ 잠실종합운동장 주경기장 기계실 기계설비를 중앙집중식 자동제어 시스템을 설치하여 기계설비의 사고 발생을 미연해 방지하고 에너지 효율을 극대화 하고자 하며 주경기장, 실내체육관의 행사일정 없는 7월 이후에 공사를 시행하고자 함.

따로붙임 : 1. 현장사진 1부.

2. 산출기초조사서 및 내역서 1부. 끝.

◎ 기계설비 현장 사진

주경기장 기계실 전경	대형보일러
냉동기	공조기
냉각탑	각종 펌프